【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		방재시설부 김학지		요청일		2014년 월 일
공 사 명	공릉2빗물펌프장신설 및 면목4동 배수관로 설치공사
공사개요	공사규모		펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
	공사기간		2013 . 01 . 08 ~2015 . 6 . 30
	감 리 사		서울시설공단
	설 계 사		도화엔지니어링
	시 공 사		㈜승영기술공사
자문 안건명			기존BOX개구부 폐쇄 (면목)				요청금액		36,839천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 기존하수암거를 고지배수관로로 활용함에 따라 하수관로,빗물받이연결부,맨홀 등 개구부 폐쇄
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - - ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 33개소 - 증 감 : 33개소					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : -천원 - 변 경 : 36,839천원 - 증 감 : 36,839천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 원설계자 검토의견 사본 1부 4. 신규공종 단가결정 근거 1부. 5. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014.07.01.~2014.07.31 ▪ 소요관급자재 1. 2.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	공릉2빗물펌프장신설 및 면목4동 배수관로 설치공사
계약금액	5,365,668 천원	계약일	2012.12.31	시공사	㈜승영기술공사
공사기간	2013. 01. 08 ~2015. 6. 30	낙찰율	85.690%	설계자	도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	서울시설공단
공사규모	공릉2빗물펌프장 : 토출용량469m2/,분,인입관거412m, 면목4동배수관거 : 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m			※ 작성자 : 김학지 (☎ 3708-8765)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			개구부 33개소 폐합	(증)33개소
공 사 비	천원		36,839천원	(증)36,839천원
적 용 요 율	낙찰율 85.609%		협의율(낙찰율) 85.609%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	업무연락전 SMIH-14-28988(2014.06.11.),공사감독2처-8429(2014.06.10.)
	관련규정	공사계약일반조건 제00조 제00항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	면목4동 기존암거를 고지배수관로로 활용함에따라 하수관로, 빗물받이연결부, 맨홀 및기존준설구 등의 개구부 폐쇄
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 업무연락전 SMIH-14-28988(2014.06.11.),공사감독2처-8429(2014.06.10.)