설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 김구		요청일		2015년 5월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
공사개요	공사규모		도로(4~10차로,연장7.96km), 지하차도(4개소):2,790m, 교량(2개소):540m
	공사기간		2002. 07. 03 ~ 2018. 07. 31
	감 리 사		㈜동명기술공단건축사사무소
	설 계 사		㈜수성엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)외 1개사
자문 안건명			본선고가교(BR2) 보완설계에 따른 강교 제작 등 수량 변경				요청금액		증 299,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 본선고가교(BR2) 보완설계에 따른 부재 규격 변경으로 강재 수량 등 변경 (강교제작, 운반, 설치, 도장 수량 변경 및 비파괴검사 수량 정정)
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 강교 보완설계 관련 변경사항 검토한 결과 적정함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 강교 제작 2,944.422톤 강교 분절 115Seg - 변 경 : 강교 제작 3,085.113톤 강교 분절 120Seg ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 강교제작 2,944.422톤 - 변 경 : 강교제작 3,085.113톤 - 증 감 : 강교제작 140.691톤					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 8,342,000천원 - 변 경 : 8,641,000천원 - 증 감 : 증299,000천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 강교제작 및 설치 수량 변경 - 강교 도장, 비파괴검사(RT, MT, UT) 수량 변경 - Cross Beam 규격변경(H=1.4→1.1~1.9m)
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
계약금액	222,995,000천원	계약일	2002.06.28	시공사	롯데건설(주)외1개사
공사기간	2002. 7. 3 ~ 2018. 7. 31	낙찰률	59.714%	설계자	㈜수성엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동명기술공단 건축사사무소
공사규모	-폭원4-10차도, 연장 7.96KM -지하차도(4개소) : 2,790M -교량(2개소) : 540M			※ 작성자 : 김 구(☎ 3708-8667)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 강교제작 2,944.422톤 • 강교도장(연결판외 : 70,914㎡) • 비파괴검사 (RT : 1,362매, MT : 7,247m, UT : 2,873m)		• 강교제작 3,085.113톤 • 강교도장(연결판외 : 75,042㎡) • 비파괴검사 (RT : 402매, MT : 2,422m, UT : 1,819m)	• 제작 증)140.691톤 • 도장 증) 4,128㎡ • R.T 감) 960매 M.T 감) 4,825m U.T 감) 1,054m
공 사 비	8,342,000천원		8,641,000천원	증) 299,000천원
적 용 요 율	기계약단가		기계약단가
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	기계약단가 (낙찰율 : 59.714%)
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부15-2431호(2015.04.30.)
	관련규정	공사계약 일반조건 제19조, 제19조의 2
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	본선고가교(BR2) 보완설계에 따른 강교 제작, 설치 규격 및 수량 등 변경사항 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인 요청 : 동기강 2015-150호(2015.03.31.)

· 설계변경 검토보고 : 토목부 – 9028호(2015.04.30)

· 실정보고 승인 통보 : 도시기반시설본부15-2431호(2015.04.30.)