설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		토목부 담당 박웅교		요청일		2016년 3 월 일
공 사 명	장안교(구교) 성능개선공사
공사개요	공사규모		-. 기존교량 철거(B = 17 m, L = 200 m) -. 교량신설 (B = 17 m, L = 218 m : 라멘교 + Pre-Flex Beam 교) -. 교통우회용 가교 : 200 m(TRIAS 공법)
	공사기간		2014. 12. 16. ~ 2016. 12. 15.
	감 리 사		㈜삼안, ㈜유신, ㈜경동엔지니어링
	설 계 사		㈜서영eng, ㈜삼보기술단
	시 공 사		새천년종합건설(주), ㈜승영기술공사
자문 안건명			구조물(교각) 시공에 대한 공기단축방안 - 교각 거푸집 및 가시설 변경				요청금액		증 113,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 중랑천 하천점용허가 지연 및 수방기간 하천공사 중지로 공기지연이 예상됨에 따라 간접비 발생 및 시민불편을 최소화하기 위해 구조물(교각) 시공에 대한 공기단축 비용 반영
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 구조물(교각) 거푸집 변경 (합판거푸집 → 강재거푸집) - 쉬트파일 근입깊이 변경 (5.5m→4.0m) ▪ 물량 증감내역 - 합판거푸집 → 강재거푸집(자재변경) - 쉬트파일 항타/워터젯 (감 314 m)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 824,000 천원 - 변 경 : 937,000 천원 - 증 감 : 증 113,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공(교량 교각 구조물)
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부 2. 설계내역서 1부 3. 변경전후 도면 사본 1부					▪ 공사예정시기 - 2016. 03~06월 ▪ 소요관급자재 - 대상 사업아님

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	장안교(구교) 성능개선공사
계약금액	12,669,360천원	계약일	2014.12.10.	시공사	새천년종합건설(주) 외 1개사
공사기간	2014.12.16. ~ 2016.12.15.	낙찰율	82.096 %	설계자	㈜서영eng 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	(주)삼안 외 2개사
공사규모	• 기존교량 철거(B = 17 m, L = 200 m) • 교량신설 (B = 17 m, L = 218 m) : 라멘교 + Pre-Flex Beam교 • 교통우회용 가교 : 200 m(TRIAS 공법)			※ 작성자 : 박 웅 교 (☎ 02-3708-2546)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 합판거푸집(1,070 ㎡) • 목재원형거푸집(571 ㎡) • 강관동바리(2,115 공/㎥) • 쉬트파일항타/워터젯 (314 m)		• 합판거푸집(70 ㎡) • 코핑강재거푸집(1,000 ㎡) • 강재원형거푸집(571 ㎡) • 강관동바리(감2,115 공/㎥) • 쉬트파일항타/워터젯(감314 m)	• 합판거푸집(감 1,000 ㎡) • 코핑강재거푸집(증 1,000 ㎡) • 목재원형거푸집(감 571 ㎡) • 강재원형거푸집(증 571 ㎡) • 쉬트파일항타/워터젯(감314 m)
공 사 비	824,000 천원		937,000 천원	증 113,000 천원
적 용 요 율	낙찰률(82.096 %)		낙찰률(82.096 %)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반 시설본부 16-1223, 2016.02.24.)
	관련규정	[지방자치단체 공사계약일반조건] 제6절 1호의 가 “설계변경” 에 의거 계약금액 조정.
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 중랑천 하천점용허가 지연 및 수방기간 하천공사 중지로 공기지연 예상됨에 따라 간접비발생 및 시민불편 최소화하기 위해 구조물(교각) 시공에 대한 공기단축 방안.
효 과	① 공기단축( 9월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 구조물(교각) 시공에 대한 공기단축방안 실정보고(삼안 장안교 2016-032호, 2016.02.23.)

- 실정보고 승인(도시기반 시설본부 16-1223, 2016.02.24.)

- 실정보고 승인 통보(삼안 장안교 2016-035, 2016.02.25.)