【별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2015년 08월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2015. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			발파암 사토처리				요청금액		543,400천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 현장에서 발생되고 있는 발파암들은 공개입찰 후 매각되고 있으나 절리로 잘게 파쇄되거나 암편 색상으로 암매각 업체에서 매입을 거부하는 발파암에 대해 공정상 현장 성토재로 활용할 수 없는 경우 불가피하게 사토 처리하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 발파암 사토처리 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 원석매각대금공제 17,805㎥ - 변 경 : 기존 사토장(경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산39-1)으로 반출 17,805㎥					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : -9,900천원 - 변 경 : 533,500천원 - 증 감 : 543,400천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토 공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 12. ~ 2015. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	36,942,000 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2015.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	17,805㎥		17,805㎥	수량증감 없음 매각→사토처리
공 사 비	-9,900천원		533,500천원	543,400천원
적 용 요 율			협의율 90.57%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	[발주처 승인공문] 참조
설계변경 근거	방 침	도시기반시설본부-15-3604호(2015.07.06)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	현장에서 발생되고 있는 발파암들은 공개입찰 후 매각되고 있으나 암반내 절리로 깍기작업중 잘게 파쇄되거나 암편 색상으로 암매각 업체에서 매입을 거부하는 발파암에 대하여는 성토재로 활용하나, 공정상 현장 성토재로 활용하지 못할 경우 불가피하게 사토 처리 필요.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 도시기반시설본부-15-3604호(2015.07.06) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제15-1-137(2015.06.04) : 실정보고 요청