설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	토목부-	요청부서		광역도로팀 담당 이한규		요청일	2014년 5월 일
공 사 명	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사
공사개요	공사규모		·남부순환로 구조개선 -지하차도 : 폭4차로, 연장 736m -남.북측측도 : 폭2~3차로, 연장 2,680m
	공사기간		2007. 9. 10 ~ 2014. 6. 30
	감 리 사		(주)동명기술공단, (주)동일기술공사
	설 계 사		(주)동명기술공단, (주)경화엔지니어링
	시 공 사		(주)케이에스씨건설, 대우조선해양건설(주)
자문 안건명			보차도경계석 형식변경			요청금액		증)73,799천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』중 보차도경계석 설치와 관련하여 『서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0(서울시발행, 2013년3월)』에 의거 경계석(화강석) 형식 변경에 따른 공사비 변경.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 -보차도경계석(화강석) 당초 : 직사각형(200x250x1000, 모따기 직각) 변경 : 급경사형(미끄럼방지용) (200(175+25)x250x1000, 모따기 라운딩R=10mm -도로경계석(화강석) 당초 : 직사각형(150x150x1000, 모따기 직각) 변경 : 직사각형(미끄럼방지용) (150x150x1000, 모따기 직각) ▪ 물량 증감내역[별첨]					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 46,057 천원 - 변 경 : 119,856 천원 - 증 감 : 증)73,799 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 보차도경계석 및 도로경계석 형식 변경
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 -‘14년4월 ~ ’14년 6월 ▪ 소요관급자재 -해당없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사
계약금액	45,945,504천원	계약일	2007. 09. 03	시공사	(주)케이에스씨건설
공사기간	2007. 9. 10~2014. 6. 30	낙찰율	65.736%	설계자	(주)경화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)동명기술공단
공사규모	·남부순환로 구조개선 -지하차도 : 폭4차로, 연장 736m -남.북측측도 : 폭2~3차로, 연장 2,680m			※ 작성자 : 업무담당(☎ )

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-보차도경계석(화강석) 직사각형(200x250x1000, 모따기 직각)⇒1,109EA -도로경계석(화강석) 직사각형(150x150x1000, 모따기 직각)⇒2,132EA		-보차도경계석(화강석) 급경사형(미끄럼방지용) 200(175+25)x250x1000, 모따기 라운딩R=10mm ⇒2,465EA -도로경계석(화강석) 직사각형(미끄럼방지용) (150x150x1000, 모따기 직각) ⇒2,132EA	-보차도경계석 : 증)1,356EA -도로경계석 : 수량 변경없음
공 사 비	46,057천원		119,856천원	증)73,799천원
적 용 요 율	낙찰율 65.7360%		협의율 91%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	실정보고 승인(부장 ’14.3.25)
설계변경 근거	방 침	실정보고(’14.3.25)
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 및 지방지치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 제74조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』중 보차도경계석 설치와 관련하여 『서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0(서울시발행, 2013년3월)』에 의거 경계석(화강석) 형식 변경에 따른 설계변경.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

·  - 서울특별시장 방침 제134호(보도 60년 관행에 마침표를 찍겠습니다)

- 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0 발행

-  남부감 제14-60호(보차도 및 도로경계석 형식변경 실정보고)

-  업무연락전 SMIH-14-20588호(보차도 및 도로경계석 형식변경 실정보고 승인)