설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		터널건설과 담당 박근우		요청일		2015년 03월 일
공 사 명	방화대교 남단접속도로건설공사
공사개요	공사규모		도로개설 L=3,021m (교량 : 756m, 터널 : 949m, 토공 : 1,316m)
	공사기간		2005.10.05~2015.10.31
	감 리 사		(주)삼보기술단
	설 계 사		(주)다산컨설턴트외 1개사
	시 공 사		(주)금광기업, 보령종합건설(주)
자문 안건명			램프교 구조안전성 검토결과 반영				요청금액		106,711천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 2014.05.14. 개최된 “방화대교 남단 접속도로 구조검토 자문회의” 결과에 의거 제시된 아웃트리거(Outrigger) 보강방안 구조안전성 검토결과를 설계변경 하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 강교 부반력 제어방안 검토결과 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 강교보강 4개소 , 받침교체 8개소 - 증 감 : 증 강교보강 4개소 , 받침교체 8개소					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 106,711천원 - 증 감 : 증 106,711천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공
별첨서류	1. 실정보고서 사본 1부.					▪공사예정시기 2015. 03~2015. 04 ▪소요관급자재 - 해당사항 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	방화대교 남단접속도로 건설공사
계약금액	66,092,972천원	계약일	2005.09.29	시공사	(주)금광기업외 1사
공사기간	2005.10.05~2015.10.31	낙찰율	81.045%	설계자	(주)다산컨설턴트외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)삼보기술단
공사규모	도로개설 L=3,021m - 교량 : 756m, 터널 : 949m, 토공 : 1,316m			※ 작성자 : 업무담당 박근우 (☎ 3708-2569)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		강교 아웃트리거 보강 4개소 교량받침 교체 8개소	증 강교보강 4개소 받침교체 8개소
공 사 비	- 천원		106,711 천원	증 106,711천원
적 용 요 율	-		-
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약상대자 책임이 없는 사유
설계변경 근거	방 침	보강설계 승인 (도시기반시설본부-15-1400호, 2015.03.16)
	관련규정	공사계약일반조건 제11조 및 제19조)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ②설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1. 램프교 구조안전성 검토(부반력 제어방안) 결과 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 (램프교량 안전성 검토 및 보강설계 실정보고 승인요청 ; 방화 제2015-036호, 2015.03.11)

· 보강설계 승인 (도시기반시설본부-15-1400호, 2015.03.16)