설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		터널건설과 담당 홍상필		요청일		2015년 06월 일
공 사 명	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사
공사개요	공사규모		고가철거 및 신설 L=753m (고가설치405m, 옹벽설치: 208m,기존보수보강: 140m)
	공사기간		2011.01.06. ~ 2015.12.31
	감 리 사		(주)한국종합기술, ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소
	설 계 사		(주)동일기술공사외 1개사
	시 공 사		(주)흥화, 보훈종합건설(주)
자문 안건명			상부공 시공방법 변경				요청금액		118,800천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 교량 상부공 슬라브 시공시 하부교통통행에 따른 시공안전성 확보 및 품질확보를 위해 변경(합판거푸집+목재동바리→프리캐스트 패널)함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : -
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 상부 슬라브 시공방법 변경 (합판거푸집+목재동바리→프리캐스트 패널) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 합판거푸집 2,171㎡, 목재동바리 3,904㎡ - 변 경 : Rib-Deck 2,089㎡ - 증 감 : Rib-Deck 증 2,089㎡ 거푸집 감 1,931㎡, 동바리 감 2,712㎡					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 353,033천원 - 변 경 : 471,833천원 - 증 감 : 증 118,800천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공
별첨서류	관련도면 사본 1부. 2. 감리단 검토의견서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 당초/변경내역서 1부.					▪공사예정시기 2015. 06. ▪소요관급자재 - 철근 237.449ton - 레미콘 1,023㎥

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사
계약금액	20,221,500천원	계약일	2010.12.30	시공사	(주흥화)외 1사
공사기간	2011.01.06~2015.12.31	낙찰율	81.57%	설계자	(주)동일기술공사외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국종합기술외 1사
공사규모	고가철거 및 신설 L=753m - 고가설치 : 405m, 옹벽설치 : 208m, 기존보수보강 : 140m			※ 작성자 : 업무담당 홍상필 (☎ 3708-2568)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	· 합판거푸집 2,171㎡ · 목재동바리 3,904㎡		· Rib-Deck 2,089㎡ · 합판거푸집 240㎡ · 목재동바리 1,192㎡	· Rib-Deck 증 2,089㎡ · 합판거푸집 감 1,931㎡ · 목재동바리 감 2,712㎡
공 사 비	353,033천원		471,833천원	증 118,800천원
적 용 요 율	-		낙찰율 81.57% 적용	-
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	시공방안 승인(도시기반시설본부-15-2704. 2015. 05. 15)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조
설계변경 유형	①공기단축, ②품질향상, ③안정성 증진, ④시공성 향상
설계변경 내용	교량 상부공 슬라브 시공시 하부교통통행에 따른 시공안전성 확보 및 품질확보를 위해 변경(합판거푸집+목재동바리→프리캐스트 패널)함
효 과	① 공기단축(1개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 업무연락전(도시기반시설본부-15-2704호(2015.05.15.), “상부공 시공방안 승인”

· 현장 실정보고(한종(서빙고)제15-099호, 2015. 06.02.)

· 실정보고 승인(도시기반시설본부-15-11632호,. 2015. 06.05)