【별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 이 병 환		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	잠원2 빗물펌프장 신설공사
공사개요	공사규모		집수조 V=15,500㎥
	공사기간		2013.01.03. ~ 2015.12.31
	감 리 사		(주)신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		한국종합기술 외 2개사
	시 공 사		에스트건설(주)
자문 안건명			RPP가설방음벽 변경				요청금액 (증액)		124,593천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 기존 설계시 펌프장 구조물 부분의 가설울타리가 안전휀스로 적용되었으나 특정공사신고시 강남구청(환경과)에서 가설방음벽(H=4m~6m)조건 부여 등으로 변경 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - PRR가설방음벽 (417m) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 가설울타리 243m - 변 경 : PRR가설방음벽 417m - 증 감 : PRR가설방음벽 417m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,272천원 - 변 경 : 125,865천원 - 증 감 : 124,593천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토목공사
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부. 2. 실정보고 사본 1부. 3. 변경전후 도면 사본 1부.					▪ 공사예정시기 2013. 11. ~ 2013. 12 ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	잠원2 빗물펌프장 신설공사
계약금액	13,565,495천원	계약일	2012.12.31	시공사	에스트건설(주)
공사기간	2013.01.03.~2015.12.31	낙찰율	80,712%	설계자	한국종합기술외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)신명건설기술공사 2개사
공사규모	□ 토출용량 Q=1,400㎥/분 □ 집수조 V=15,500㎥ □ 관로공사 :연장L=679m(BOX×3.0×2.5@2) □ 건축공사 : 1식 □ 조경공사 : 1식			※ 작성자 : 업무당당 이 병 환 (☎02-3708-8773)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	가설울타리(3개월) 243m		RPP가설방음벽(H=4~6m)	RPP가설방음벽(H=4~6m)
공 사 비	1,272천원		125,865천원	124,594천원
적 용 요 율	-		협의율 90.356%	협의율 90.356%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	RPP가설방음벽 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 강남구청(환경과-10090, 2013.03.29) 비산먼지발생사업 및 특정공사 사전신고 수리[2013-31,63호]

·

·

별 첨 2】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 이 병 환		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	잠원2 빗물펌프장 신설공사
공사개요	공사규모		집수조 V=15,500㎥
	공사기간		2013.01.03. ~ 2015.12.31
	감 리 사		(주)신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		한국종합기술외 2개사
	시 공 사		에스트건설(주)
자문 안건명			공기연장간접비				요청금액 (증액)		298,848천원
자문요청사유			▢ 3,000만원 이상 변경사항 ☑ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ☑ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 행정행위(도시공원점용허가 등)이행에 의한 실착공 지연 및 사업반대민원(신현대아파트)으로 공사기간이 연장되어 간접비 발생.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 공기연장간접비 발생(540일) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : -m - 변 경 : -m - 증 감 : -m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : -천원 - 변 경 : 298,848천원 - 증 감 : 298,848천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 공통
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부. 2. 공사이생기간의 변경에 따른 실비산정보고서 사본 1부.					▪ 공사예정시기 - 해당없음 ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	잠원2 빗물펌프장 신설공사
계약금액	13,565,495천원	계약일	2012.12.31	시공사	에스트건설(주)
공사기간	2013.01.03.~2015.12.31	낙찰율	80,712%	설계자	한국종합기술외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)신명건설기술공사 2개사
공사규모	□ 토출용량 Q=1,400㎥/분 □ 집수조 V=15,500㎥ □ 관로공사 :연장L=679m(BOX×3.0×2.5@2) □ 건축공사 : 1식 □ 조경공사 : 1식			※ 작성자 : 업무당당 이 병 환 (☎02-3708-8773)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		공기연장간접비	공기연장간접비
공 사 비	-천원		298,848천원	298,848천원
적 용 요 율	-		-	-
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	RPP가설방음벽 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

·

·

·