설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 도시도로과 담당 박웅교		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사
공사개요	공사규모		• 도로 L=553m B=5～6.2m
	공사기간		2013. 12. 30 ~ 2016. 12. 29
	감 리 사		극동엔지니어링(주),(주)동일기술공사
	설 계 사		(주)수성엔지니어링,(주)대한콘설탄트,
	시 공 사		풍림산업(주), 흥일토건
자문 안건명			가설방음벽 설치 변경				요청금액		증)81,602천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사시 건설장비 소음 및 진동 저감 대책으로 환경관리시설인 가설방음벽 설치 철거 설계반영 - 설계내역서 : EGI휀스 설치철거 - 종합보고서 및 도면, 수량산출서 : 가설방음벽 ⇒ 설계내역서와 종합보고서 및 도면, 수량산출서 상호 모순 ⇒ EGI휀스 설치철거는 소음․진동등을 저감할수 없으므로 가설방음벽 설치철거로 변경
설계자 의견(요약) ○ 내용 : 공사시 건설장비 소음․진동 대책인 가설방음판넬은 설계위치,연장 및 공사진행 개월수,단가를 반영하여 감독원(감리원)이 판단하여 여건변경(작업조건,공사일정등)을 발주처와 협의조정하기 바람
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 환경관리시설 EGI 휀스 설치철거 - 변 경 : 환경관리시설 가설방음벽 설치철거 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : EGI휀스 설치철거 640m - 변 경 : 가설방음벽 설치철거 640m - 증 감 : -					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 24,673 천원 - 변 경 : 106,275 천원 - 증 감 : 81,602 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공(환경관리시설)
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부					▪ 공사예정시기 2014년 11월 ▪ 소요관급자재 해당사항 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사
계약금액	8,899,000천원	계약일	2013. 12. 30	시공사	풍림산업(주)외 1
공사기간	2013.12.26 ~ 2016.12.29	낙찰율	88.151%	설계자	(주)대한콘설탄트외 1
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	극동엔지니어링(주)외 1
공사규모	• 도로 L=553m B=5.1～6.2m • 램프교 L=202m B=5.1～6.2m • 보도BOX 및 U-TYPE L=67m B=6.24m			※ 작성자 : 업무담당 박웅교 (☎:3708-8664)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	환경관리시설 - EGI 휀스 설치철거 L=640m		환경관리시설 - 가설방음벽 설치철거 L=640m	증 액
공 사 비	24,673 천원		106,275 천원	81,602 천원
적 용 요 율	낙찰율 88.151%		낙찰율 88.151%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(’14.11.07):도시기반시설본부-14-43438
	관련규정	공사계약일반조건 제19조2 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등 ) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	건설장비 진동소음 저감대책으로 당초 EGI 휀스 설치철거를 가설방음벽 설치철거로 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인 요청 – 극감정릉 제14-94호(2014.11.4.)

· 실정보고 승인 알림 – 도시기반시설본부-14-43438호(2014.11.7.)

· 실정보고 승인 알림 – 극감정릉 제14-98호(2014.11.7.)