【별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2015년 08월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2015. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			현장근무자 추가배치				요청금액		54,890천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 「서울시 건설공사장,현장근무자 배치기준 및 근무요령」 기준에 따라 건설공사장 현장근무자(교통정리원,현장정리원,보행안전도우미등)를 배치하여 운영해 왔으나, 실 투입인원이 당초 추정한 인원수를 초과하여 잔여 공사기간을 감안할 때 현장근무자 추가 배치가 필요함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 현장근무자 추가배치 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 현장근무자 626인 - 변 경 : 현장근무자 1,152인					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 65,120천원 - 변 경 : 120,010천원 - 증 감 : 54,890천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부 대 공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2015. 01. ~ 2015. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	36,942,000 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2015.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	교통정리원 250인 현장정리원 125인 보행도우미 250인		교통정리원 418인 현장정리원 594인 보행도우미 140인	교통정리원 168인 현장정리원 469인 보행도우미 -110인
공 사 비	65,120천원		120,010천원	54,890천원
적 용 요 율			협의율 90.57%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	도시기반시설본부-15-2823호(2015.05.21)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	「서울시 건설공사장,현장근무자 배치기준 및 근무요령」 기준에 따라 건설공사장 현장근무자(교통정리원,현장정리원,보행안전도우미등)를 배치하여 운영해 왔으나, 실 투입인원이 당초 추정한 인원수를 초과하여 잔여 공사기간을 감안할 때 현장근무자 추가 배치
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 도시기반시설본부-15-2328호(2015.05.21) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-121(2015.05.14) : 실정보고 요청