설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		방재시설부담당한종수		요청일		2014년 11월 25일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 12. 31
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			지정폐기물 처리비용 반영				요청금액		증65,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ☑ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 본 저류조 설치공사 이후 조경공사 중 지정폐기물 출현으로 지정폐기물 처리비용 발생하여 변경 시공하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : - 변 경 : 지정폐기물 처리비 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 지정폐기물 처리비(액상:10ton, 고상:110ton) - 증 감 : 지정폐기물 처리비(액상:10ton, 고상:110ton)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 천원 - 변 경 : 65,000 천원 - 증 감 : 65,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공,부대공,철거공 등
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 11. ▪ 소요관급자재 1. 2.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.12.31	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=220.40m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			지정폐기물 액상(10ton) 지정폐기물 액상(110ton)	지정폐기물: 액상(10ton) 지정폐기물: 액상(110ton)
공 사 비			65,000 천원	65,000 천원
적 용 요 율			견적가(낙찰율) 100%(85.496%)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	견적가
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	본 저류조 설치공사 이후 조경공사 중 지정폐기물 출현으로 지정폐기물 처리비용 발생하여 변경 시공하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 기업환경과-53625(2014.09.26) (서초구 → 도기본 )

- 잠원2감 2014-251(2014. 10. 01) (감리단 → 시공사)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	2	요청부서		방재시설부담당한종수		요청일		2014년 11월 25일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 12. 31
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			토출관로(서초대로 68길)변경 시공				요청금액		증 144,900천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ☑ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 저류조 합동점검시 유관기관(서초구청) 요구사항인 토출관로 개선공사(서초대로 68길)를 변경 시공하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : - 변 경 : 흄관 개량공사 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 흄관접합 및 부설 (D400 L=20m, D600 L=181.5m) - 증 감 : 흄관접합 및 부설 (D400 L=20m, D600 L=181.5m)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 천원 - 변 경 : 144,900 천원 - 증 감 : 144,900 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공,관로공,구조물공,포장공,부대공 등
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 11. ▪ 소요관급자재 1. 2.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.12.31	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=220.40m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			흄관접합 및 부설 (D400 L=20m, D600 L=181.5m)	지정폐기물: 액상(10ton) 지정폐기물: 액상(110ton)
공 사 비			144,900 천원	144,900 천원
적 용 요 율			협의율(낙찰율) 92.748%(85.496%)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	방재시설부-8155 (2014. 08. 26)
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	저류조 합동점검시 유관기관(서초구청) 요구사항인 토출관로 개선공사(서초대로 68길)를 변경 시공하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 업무연락전 도시기반시설본부-14-43378 (도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-274(2014. 11. 07) (감리단 → 시공사)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	3	요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2015. 12. 30.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			설계도서 검토 결과 반영				요청금액		증)367,218천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : "남부순환로~오정대로간 도로개설공사"중 설계도서 검토의견(감리단, 시공자)에 대한 설계사의 설계도서 검토의견을 반영하여 공사의 증ㆍ감 사항을 반영함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 설계도서 검토에 대한 설계사((주)도화엔지니어링)의 배수공 변경 등의 의견을 반영함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : 보완설계 내역 - 변경 : 보완설계 내역에 대한 설계도서 검토의견 반영 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 - 보완설계 1식 ○변경물량 - 배수공 변경 반영 1식(우수,횡배수,종배수관외) - 한국형 포장 변경 적용 1식 - 기타 수량오류, 폐기물 반영 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 5,691,222천원 - 변 경 : 6,058,440천원 - 증 감 : 증)367,218천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공, 배수공, 포장공, 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 10월 ~ 2015년 12월 ▪ 소요관급자재 -레미콘, VR관,흄관,철근,아스콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	10,549,300천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2015.12.30	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 업무담당 정문수 (☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 보완설계내역 1식		- 배수공 변경 반영 1식 (우수, 횡배수, 종배수관 외) - 한국형 포장 변경 적용 1식 - 기타 수량오류, 폐기물 반영 1식	증액
공 사 비	5,691,222천원		6,058,440천원	증)367,218천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약금액 조정협의 자료
설계변경 근거	방 침	업무연락전 도시기반시설본부-14-46116호(2014. 11. 28)- 실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1 - 가 – 1), 2) (설계서의 내용이 불분명, 누락, 오류, 상호 모순, 현장상태와 상이)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"중 설계도서 검토의견(감리단,시공자)에 대한 설계사의 설계도서 검토의견을 반영하여 공사의 증ㆍ감 사항을 반영함.
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행 여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 업무연락전-SMIH-13-06229호(2013.6.17)- 실정보고 요청

· 현장실정보고(설계 도서 검토 실정보고)제출 – 오정 제2014-200호(2014.9.18)

· 업무연락전 도시기반시설본부-14-46116호(2014.11.28)- 실정보고 승인알림

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	4	요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2015. 12. 30.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			경계석 및 측구 형식 변경				요청금액		증)84,510천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 업무지시(보도공사 시공철저)에 의한 「보도공사 설계시공매뉴얼 Ver1.0(2013)」을 적용한 보차도 경계석 변경[250*300*1000→(175+25)*250*1000] 및 L형측구 품질향상 방침에 의한 시공변경을 반영함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초: 경계석 및 측구 - 변경: 경계석 및 측구 형식 변경 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 - 보차도경계석(250x300x1000외) : 3,227m - 도로경계석(150x150x1000) : 6,704m ○변경물량 - 보차도경계석((175+25)x250x1000외): 3,367m - 도로경계석(150x150x1000) : 6,713m - 미끄럼방지시공(150x150x1000) : 5,199m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 521,760천원 - 변 경 : 606,270천원 - 증 감 : 증)84,510천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 포장공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 11월 ▪ 소요관급자재 -보차도경계석, 레미콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	10,549,300천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2015.12.30	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 업무담당 정문수 (☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	보차도경계석 (250x300x1000외): 3,227m 도로경계석 (150x150x1000): 6,704m		보차도경계석 ((175+25)x250x1000외): 3,367m 도로경계석 (150x150x1000): 6,713m 미끄럼방지시공 (150x150x1000) : 5,199m
공 사 비	521,760천원		606,270천원	증84,510천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약금액 조정협의 자료
설계변경 근거	방 침	업무연락전 도시기반시설본부-14-42195호 (2014. 10.24)- 실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1 - 가 – 4) (그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"를 시행함에 있어 업무지시(보도공사 시공철저)에 의한 「보도공사 설계시공매뉴얼 Ver1.0(2013)」을 적용한 보차도경계석 변경[250*300*1000→ (175+25)*250*1000] 및 L형측구 품질향상 방침에 의한 시공변경을 반영함
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행 여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 업무연락전-SMIH-14-31228호 (2014. 07.04)- 보도공사 시공철저(보도시공지침적용) 요청

· 현장실정보고(경계석 및 측구 형식 변경 실정보고)제출 – 오정 제2014-221호(2014.10.13)

· 업무연락전 도시기반시설본부-14-42195호 (2014. 10.24)- 실정보고 승인알림

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	5	요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2015. 12. 30.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			기존 수로구간 퇴적지반 처리비 반영				요청금액		증)33,690천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : "남부순환로~오정대로간 도로개설공사"를 시행함에 있어 STA.NO.0+220,STA.NO.0+390 구간의 기존수로 바닥에 퇴적된 지반에 의한 장.단기적인 침하량을 최소화하기 위하여 비교 검토 방안 중 가장 적합한 방안(구입암 성토를 한 후 양질토사로 되메우고 다짐)으로 지반을 처리함을 반영함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : - - 변 경 : 기존수로 바닥 퇴적지반 처리비 설계 반영 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 : - ○변경물량 : - 순쌓기 : 971㎥ - 되메우고 다짐 : 1,799㎥ - 사석채움 : 1,089 ton					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 0천원 - 변 경 : 33,690천원 - 증 감 : 증 33,690천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공외
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 11월 ▪ 소요관급자재 -없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	10,549,300천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2015.12.30	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 업무담당 정문수 (☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 순쌓기 : 0 ㎥ - 되메우고 다짐 : 0㎥ - 사석채움 : 0 ton		- 순쌓기 : 971㎥ - 되메우고 다짐 : 1,799㎥ - 사석채움 : 1,089 ton	증액
공 사 비	- 천원		33,690천원	증 33,690천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약금액 조정협의 자료
설계변경 근거	방 침	업무연락전 SMIH-14-38149호(2014. 9.23)-실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1 - 가 – 2) (현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"를 시행함에 있어 STA.NO.0+220,STA.NO.0+390 구간의 기존수로 바닥에 퇴적된 지반에 의한 장.단기적인 침하량을 최소화하기 위하여 비교 검토 방안중 가장 적합한 방안(구입암 성토를 한후 양질토사로 되메우고 다짐)으로 지반을 처리함을 반영함
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행 여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 검토요청(기존수로구간 불량지반 처리방안 검토요청에 대한 회신) – 천호수 제2014-546호(2014.8.25.)

· 현장실정보고(기존수로구간 퇴적지반 처리)제출 – 오정 제2014-180호(2014.8.25)

· 업무연락전 SMIH-14-38149호(2014. 9.23)- 실정보고 승인알림

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	6	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			사토장추가선정 (광주시 퇴촌면, 구리암사대교현장)				요청금액		감360,800천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ☑ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 당초 마곡지구가 폐쇄되어 발생사토를 가까운 LH공사의 하남미사지구로 반출하였으나 LH공사와 서울시간의 사업비 협의 지연으로 하남미사지구로 반출이 불가하여 광주시 퇴촌면 도수리 및 구리시 교문1동 구리암사대교 현장으로 반출하고져 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 사토장추가선정 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 마곡지구(41.9km) - 변 경 : 경기도 광주시 퇴촌면 도수리(32.3km) 경기도 구리시 암사대교현장(10.5km)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,806,200천원 - 변 경 : 1,445,400천원 - 증 감 : -360,800천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토 공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 2. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	사토장: 마곡지구(41.9km) 토사: 80,000㎥ 리핑: 20,000㎥		사토장: 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 (32.3km) 경기도 구리시 암사대교현장 (10.5km) 토사: 80,000㎥, 리핑: 20,000㎥	수량증감 없음 마곡지구→퇴촌면 도수리 (-9.6km) 암사대교현장 (-31.4km)
공 사 비	1,806,200천원		1,445,,400천원	-360,800천원
적 용 요 율			협의율 90.57%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	[발주처 승인공문]참조
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-19488호(2014.03.07)
	관련규정	공사계약일반조건 제7절 4.그밖에 계약내용의 변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	당초 사토장인 마곡지구가 폐쇄되어 가까운 하남미사지구로 반출하였으나 LH공사와 서울시간의 사업비협의지연으로 하남미사지구로 반출이 불가하여 추가사토장선정.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-19488호(2014.03.07) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-34(2014.02.21) : 실정보고 요청

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	7	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			발파암깍기 공법변경				요청금액		증550,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 STA.1+640~1+800구간의 노출된 암반에 대하여 발파 작업시 인접하여 상수관로 및 상가시설이 위치하고 있어 발파로 인한 소음진동피해와 비산석 피해발생이 예상되어 발파암깍기 공법변경하고져 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 발파암깍기 공법변경 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 중규모진동제어발파 - 변 경 : 브레이커 암파쇄					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 342,100천원 - 변 경 : 892,100천원 - 증 감 : 550,000천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토 공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 2. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	중규모진동제어발파 30,376㎥		브레이커 암파쇄 30,376㎥	수량증감 없음 발파공법→기계적암파쇄
공 사 비	342,100천원		892,100천원	550,000천원
적 용 요 율			협의율 90.57%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	[발주처 승인공문] 참조
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-37488호(2014.09.16)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	STA.1+640~1+800구간의노출된 암반에 대하여 발파 작업시 인접하여 상수관로, 도시가스매설 및 상가시설이 위치하고 있어 발파로 인한 소음진동피해발생이 예상되어 발파암깍기 공법변경하고져 함
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-37488호(2014.09.16) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-189(2014.07.04) : 실정보고 요청

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	8	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			강관네일링 수량변경(축소)				요청금액		감487,300천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 STA.1+640~1+800구간의 절토사면은 당초 설계시 토사사면으로 불안정하여 강관네일링을 설치하여 사면안정성을 확보하도록 설계되어 있었으나 굴착결과 일부구간 암반이 형성되어 있어 사면안정성검토결과 구배완화공법으로 안정성을 확보할 수 있게 됨.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 강관네일링 수량변경(축소) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 강관네일링 설치(토사) - 변 경 : 구배완화공법(토사+암반)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 933,900천원 - 변 경 : 446,600천원 - 증 감 : -487,300천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 비탈면안정공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 06. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	강관네일링공법		구배완화공법	네일설치 : -312공 천 공 : -4,692m 수평배수공: -64공
공 사 비	933,900천원		446,600천원	-487,300천원
적 용 요 율			낙찰율 81.143%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-32349호(2014.07.17)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	STA.1+640~1+800구간의 절토사면은 당초 설계시 토사사면으로 불안정하여 강관네일링을 설치하여 사면안정성을 확보하도록 설계되어 있었으나 굴착결과 일부구간 암반이 형성되어 있어 사면안정성검토결과 구배완화공법으로 안정성을 확보할 수 있게 됨.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-32349호(2014.07.17) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-192(2014.07.04) : 실정보고 요청

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	9	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			산마루측구 형식변경(현장타설→ESP조립식)				요청금액		감 78,900천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 사면에 설치토록 되어 있는 산마루측구의 형식이 현장타설식으로 되어 있어 공기가 길고 절토법면에서 콘크리트타설을 하기에 품질확보가 힘들고 안전사고의 위험이 있어 품질과 안전을 확보하면서 공사금액절감이 가능한 ESP조립식 측구로 변경함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 산마루측구 형식변경(현장타설→ESP조립식) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : TYPE-1 1,241M, TYPE-3 589M (현장타설식) - 변 경 : TYPE-1 1,241M, TYPE-3 589M (ESP조립식)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 302,900천원 - 변 경 : 224,000천원 - 증 감 : -78,900천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 배수공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 5. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 레미콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	TYPE-1 1,241M TYPE-3 589M (현장타설식)		TYPE-1 1,241M TYPE-3 589M (ESP조립식)	수량증감 없음 현장타설→ESP조립식
공 사 비	302,900천원		224,000천원	-78,900천원
적 용 요 율	낙찰율 81.143%		낙찰율 81.143%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-21570호(2014.04.02)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	당초 현장타설식 산마루측구를 품질과 안전성을 확보하고 공사금액절감이 가능한 ESP조립식 측구로 변경 시행함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-21570호(2014.04.02) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-47(2014.03.04) : 실정보고 요청

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	10	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			고덕산구간 암매각 및 상차비 반영				요청금액		증55,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ☑ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 고덕산구간에서 발생되고 있는 발파암의 매각결정에 따라 공사금액이 가장 저렴한업체로 현장에서 상차해 주기 위한 상차비 및 매각대금지불을 하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 고덕산구간 발파암 매각 및 상차 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 매각 49,780㎥ - 변 경 : 매각 49,780㎥ 상차 7,315㎥					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 28,600천원 - 변 경 : 26,400천원 - 증 감 : 55,000천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토 공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 5. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m, L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	매각 7,315㎥		매각(암매각 입찰) + 상차비 7,315㎥	수량증감 없음 매각→매각+상차비
공 사 비	-28,600천원		26,400천원	55,000천원
적 용 요 율			낙찰율 90.57%
설계변경요구자	☑▢ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	[발주처 승인공문]참조
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-38588호(2014.09.26)
	관련규정	공사계약일반조건 제7절 4.그밖에 계약내용의 변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	선사로~고덕지구간 도로확장공사중 고덕산구간에서 발생되고 있는 발파암의 매각결정에 따라 공사금액이 가장 저렴한업체로 현장에서 상차해 주기 위한 상차비 및 매각대금지불을 하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-38588호(2014.09.26) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-188(2014.07.03) : 실정보고 요청

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	11	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			자전거도로 휀스 규격변경				요청금액		증68,200천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 기존에 설치토록 되어 있는 자전거도로휀스(W1700xH1000)는 『서울형 자전거도로설치 및 유지관리 매뉴얼(2012.02)』의 규정에 맞지 않아 규정에 맞는 규격(W2000xH1280)으로 변경함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 자전거도로휀스 규격변경 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 자전거휀스(W1700xH1000) - 변 경 : 자전거휀스(W2000xH1280)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 322,300천원 - 변 경 : 390,500천원 - 증 감 : 68,200천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 08. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m, L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	자전거휀스 (W1700xH1000)		자전거휀스 (W2000xH1280)	수량증감 없음 규격변경 W1700xH1000 →W2000xH1280
공 사 비	322,300천원		390,500천원	68,200천원
적 용 요 율	낙찰율 81.143%		조달가 100%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	[발주처 승인공문]참조
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-26968호(2014.05.22)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	당초 자전거도로휀스(W1700xH1000)는 높이 규정에 맞지 않아 규정에 맞는 규격 (W2000xH1280)로 변경하고져 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-26968호(2014.05.22) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-122(2014.05.08) : 실정보고 요청

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	12	요청부서		토목부 담당 이한규		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2014. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			현장사무실 기간연장				요청금액		증85,800천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 공사기간(2009.01.06.~2013.12.31.→2009.01.06.~2014.12.31.)이 변경됨에 따라 현장사무실도 연장하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 현장사무실 공기연장 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 36개월 - 변 경 : 48개월					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 260,700천원 - 변 경 : 346,500천원 - 증 감 : 85,800천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 본부 방침서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. 01. ~ 2014. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
계약금액	35,444,220 천원	계약일	2008. 12. 31	시공사	(주)대저건설 외 1개사
공사기간	2009.01.06～2014.12.31.	낙찰율	81.143%	설계자	㈜한국종합기술외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국건설관리공사외 1개사
공사규모	- 위 치 : 암사동 고덕동 일원 - 규 모 : 도로확장공사 •도로폭원 : 8~10m⟶28.5~35.0m L=3.7km			※ 작성자 : 이한규 (☎3708-2556)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	36개월		48개월	증 12개월
공 사 비	260,700천원		346,500천원	85,800천원
적 용 요 율			협의율 90.57%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	[발주처 승인공문]참조
설계변경 근거	방 침	SMIH-14-30449호(2014.06.26)
	관련규정	공사계약일반조건 제7절 4.그 밖에 계약내용의 변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	공사기간(2009.01.06.~2013.12.31.→2009.01.06.~2014.12.31.)이 변경됨에 따라 현장사무실도 연장하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· SHIH-14-30449호(2014.06.26) : 실정보고 승인

· 대저선사로 제14-1-133(2014.05.16) : 실정보고 요청