설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		토목부 교량건설과		요청일		2015년 04월
공 사 명	성암로 병목구간 개선공사
공사개요	공사규모		도로확장 : 차로폭 2차로 → 4차로, L=200m 도로개선 : 차로폭 4차로, L=250m
	공사기간		2014. 02. 24 ~ 2015. 05. 23
	감 리 사		서울특별시시설관리공단
	설 계 사		㈜동일기술공사외 1사
	시 공 사		태권종합건설(주)
자문 안건명			PC옹벽 연장 감소에 따른 가시설 변경				요청금액		감 77,220천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 설계상 PC옹벽 설치 종점이 Sta. 290지점 이었으나, 성산자동차학원측 민원 요구(학원내 차량정비고로 사용중인 가설건축물 철거제외)에 의해 종점을 Sta. 270지점으로 감소가 필요하여 이에 따른 가시설 설치연장을 축소하여 설계변경 하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 해당없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - PC옹벽 설치 감소에 따른 가시설 연장 축소 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 가시설 연장 L=78m (Sta. 220∼300) - 변 경 : 가시설 연장 L=63m (Sta. 220∼272) - 증 감 : 감 L=15m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 296,120천원 - 변 경 : 218,900천원 - 증 감 : 감 77,220천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공
별첨서류	1. 설계변경 심의자료 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	성암로 병목구간 개선공사
계약금액	2,336,641천원	계약일	2014.02.20	시공사	태권종합건설(주)
공사기간	2014.02.24. ~ 2015.05.23	낙찰율	86.747%	설계자	(주)동일기술공사외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	서울특별시 시설관리공단
공사규모	도로확장 : 차로폭 2차로 → 4차로, L=200m 도로개선 : 차로폭 4차로, L=250m			※ 작성자 : 윤 명 화 (☎ 02-2290-6967)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	가시설 연장 L=78m (Sta. 220∼300)		가시설 연장 L=63m (Sta. 220∼272)	감 L=15m
공 사 비	296,120 천원		218,900 천원	감 77,220 천원
적 용 요 율	-		신규품목-낙찰율(86.747%)	-
설계변경요구자	☑ 발주처 ☐ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인【토목부-5131호 (2015.03.13)】
	관련규정	공사계약일반조건 제11조 및 제19조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ②설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1. 당초 설계상 PC옹벽 설치 종점이 Sta. 290지점 이었으나, 성산자동차학원측 민원 요구(학원내 차량정비고로 사용중인 가설건축물 철거제외)에 의해 종점을 Sta. 270 지점으로 감소가 필요하여 이에 따른 가시설 설치연장을 축소하여 반영하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 【PC옹벽 연장 감소에 따른 가시설 변경  공사감독2처-16872(2014.10.10.)】

· 실정보고 승인 【토목부-5131호, (2015.03.13)】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	2	요청부서		토목부 교량건설과		요청일		2015년 04월
공 사 명	성암로 병목구간 개선공사
공사개요	공사규모		도로확장 : 차로폭 2차로 → 4차로, L=200m 도로개선 : 차로폭 4차로, L=250m
	공사기간		2014. 02. 24 ~ 2015. 05. 23
	감 리 사		서울특별시시설관리공단
	설 계 사		㈜동일기술공사외 1사
	시 공 사		태권종합건설(주)
자문 안건명			PC옹벽 연장 감소에 따른 내역 정산				요청금액		감 78,320천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 설계상 PC옹벽 설치 종점이 Sta. 290지점 이었으나, 성산자동차학원측 민원 요구(학원내 차량정비고로 사용중인 가설건축물 철거제외)에 의해 종점을 Sta. 270지점으로 감소가 필요하여 설치연장을 축소하여 설계변경 하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 해당없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - PC옹벽 설치 감소에 따른 내역 정산 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : PC옹벽 연장 L=230m (Sta. 60∼290) - 변 경 : PC옹벽 연장 L=212m (Sta. 58∼270) - 증 감 : 감 L=18m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 903,100천원 - 변 경 : 824,780천원 - 증 감 : 감 78,320천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공
별첨서류	1. 설계변경 심의자료 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	성암로 병목구간 개선공사
계약금액	2,336,641천원	계약일	2014.02.20	시공사	태권종합건설(주)
공사기간	2014.02.24. ~ 2015.05.23	낙찰율	86.747%	설계자	(주)동일기술공사외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	서울특별시 시설관리공단
공사규모	도로확장 : 차로폭 2차로 → 4차로, L=200m 도로개선 : 차로폭 4차로, L=250m			※ 작성자 : 윤 명 화 (☎ 02-2290-6967)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	PC옹벽 연장 L=230m (Sta. 60∼290)		PC옹벽 연장 L=212m (Sta. 58∼270)	감 L=18m
공 사 비	903,100 천원		824,780 천원	감 78,320 천원
적 용 요 율	-		-	-
설계변경요구자	☑ 발주처 ☐ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인【토목부-5131호, (2015.03.13)】
	관련규정	공사계약일반조건 제11조 및 제19조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ②설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1. 당초 설계상 PC옹벽 설치 종점이 Sta. 290지점 이었으나, 성산자동차학원측 민원 요구(학원내 차량정비고로 사용중인 가설건축물 철거제외)에 의해 종점을 Sta. 270 지점으로 감소가 필요하여 PC옹벽 설치연장을 축소하여 반영하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 【PC옹벽 연장 감소에 내역 정산  공사감독2처-16873(2014.10.10.)】

· 실정보고 승인 【토목부-5131호, (2015.03.13)】