보 고 서
			담당	팀장	공사감독1처장
					전결 12/22
문서번호	공사감독1처-14078
보존기간	5년		협 조	다급
결재일자	2014.12.22.			차장
공개여부	공개
제 목	설계변경(정산)보고

Ⅰ		공 사 현 황

가. 공 사 명:신정교외2개소 보수공사

나. 공사기간:2014. 5.26 ~ 2015.01. 20

다. 도 급 비:575,953,400원

라. 공사개요:콘크리트표면보수 1,207㎡, 단면보수 136㎡, 우물통보수2기

마. 도 급 자:태평로건설(주) 대표 유지연

바. 발 주 청:강서도로사업소(시설보수과)

Ⅱ		설계변경현황

가. 설계변경 사유: 현장실정보고 및 공종별 수량변경으로 인한 변경

나. 변경내용

(1) 교량별 추가작업 지시 및 기타 물량변동 현황보고

■ 관련(추진)근거:시설보수과-9039,9831,공사감독1처-12683

- 신정교 변동사항

1) 추가작업지시 사항:

. 자전거도로 이정표 추가설치

. 신정교 우물통2기(P6)추가보수지시〔우물통2기(P5)→우물통4기(P5,6)〕

2) 현장실정보고 사항

. 안양천 물막이공법 변경〔쉬트파일+가시설→가설물막이(톤마대)〕검토보고

. 아스팔트 균열보수 물량 증가(당초:139m→340m)

3) 개략 직접공사비 변경:(감)12,231,000원

- 오류고가교 변동사항

1) 추가작업지시 사항:

. 노후 배수홈통 추가교체

. 콘크리트 균열보수 및 철근노출단면 추가 보수

2) 현장실정보고 사항

. 오류고가 슬라브하부 보수시 당초 공간비계에서 트럭탑제형 크레인변경

(오류고가 하부의 실내 체육관으로 공간비계설치 불가)

. 노후 자전거 경사로 강재도장(당초:35㎡→55㎡)

3) 개략 직접공사비 변경:(증)732,000원

- 가리봉철도고가교 변동사항

1) 추가작업지시 사항:

. 한국철도공사 협의 조건 이행

(철도관련 안전원 반영, 절연보호관 설치 등)

. 콘크리트 단면보수, 강재도장 등 추가 보수

2) 현장실정보고 사항

. 공간비계 및 보호막 설치 물량 정산(당초:500㎡→312㎡)

3) 개략 직접공사비 변경:(증)1.911,000원

(2) 기타 물량 조정 및 제경비 정산

■ 관련(추진)근거:시설보수과-10135(2014.12.18)

- 건강, 연금, 노인장기보험료, 하도급 지급수수료, 건설기계 대여금 등 정산

다. 주요공종 변경 수량

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · 감
아스팔트균열보수	홈따기 후 씰링, 야간	m	139	340	증)201
콘크리트 단면보수	EG프로텍터	㎡	57	73	증)16
배수홈통보수	STS, D150	m	95	137	증)42
가시설물 설치	쉬트파일	기	2	-	감)2
강재손료	30%	톤	82	-	감)82
예선 및 대선	최저견적	월	0.88	-	감)0.88
가설물막이공(톤마대)		매	-	331	증)331
공간비계설치	강교,브램프,6개월사용	㎡	950	360	감)590

Ⅲ		공사비 변경 현황

가. 공사비 변경 현황

(단위: 원)

구 분		당초금액	변경금액	비 고(증·감)
총공사비		575,953,400	539,968,000	감)35,985,400
도급비	공급가액	523,594,0000	490,880,000	감)32,714,000
	부가가치세	52,359,400	49,088,000	감)3,271,400
	계	575,953,400	539,968,000	감)35,985,400

Ⅳ		행 정 사 항

- 상기 설계 변경 사항을 발주청에 제출하고자 함.

붙 임 : 변경설계서(정산) 및 관련서류(별첨) 각 1부.  끝.