보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
문서번호	공사감독2처-7587
보존기간	준영구		협 조	대리
결재일자	2020.05.28.
공개여부	공개
제목	설계변경(정산) 검토보고(2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수)

‘2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)- 난지’ 감독업무를 완료하고

설계(정산)변경 사항이 발생하여 관련규정에 의하여 검토하고 아래와 같이

설계변경 하고자 합니다.

관련 규정

◯ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법

시행령 제74조 (설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

◯ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 , 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

공사 현황

◯ 공 사 명: 2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)-난지
◯ 공사기간: 2019.  9. 16 ~ 2020.  5. 31
◯ 도 급 비: 3,403,365,000원
◯ 공사개요: 단면보수(KRCD) □1.8~2.0m, L=1,624㎡, 부대공 1식
◯ 도 급 자: ㈜금강에이스건설 대표 노정범
◯ 발 주 청: 난지물재생센터 시설보수과

설계변경 심의 현황

구 분	심의요청 사유	심의일자	심의내용(요약)	비고
본부심의	시공 수량 신규단가 적정성 등	‘20. 5.25(월)	- 제경비의 적정성 검토 - 수량산출의 적정성 검토 신규 단가산출의 적정성 검토 - 기타 사항 등	심의사항 조치완료

보고 내용

◯ 설계변경 시행근거

1. 실정보고에 의한 변경

연번	구분 (제목)	주요 변경내용	비 고
1	실정보고 및 승인사항 반영	1) 1회: 불광천 작업구 맨홀 확경 - 1.8*2.8m, 2개소 추가, 상류 1개소 제외 2) 2회: 임대사무실, 준설토 야적장 설치, 물돌리기 방법 변경등 - 현장사무실 및 창고: 콘테이너, 창고 각 2동 → 임대사무실 1동 - 준설토 난지물재생센타 반입금지에 따른 상암펌프장 톤마대 설치 - 홍제천 좌안으로 물돌리기 → 종방향 물돌리기 변경(호스 물량 증) 3) 3회: 하수관거 규격변경, 홍제천 바닥세굴에 따른 점검실시 - 관거 규격변경 : 현장타설로 인한 관로 상이 측점조사 평균 적용 - 관거바닥 정밀점검 실시(홍제천 및 불광천 바닥 슬라브) 4) 4회, 7회: 홍제천 바닥 슬라브(1, 2차구간) - 바닥 슬라브(B=2m, L=760m ) 추가 단면보수시공(T=85㎜) 5) 5회: 홍제천 바닥슬라브 공사 추가구간 - 신규공종 협의단가 적용(93.391%) 6) 6회: 물가변동에 따른 계약금액 조정(3.22%) 적용 - 94,056천원(설계변경 심의 조치결과후 정산) ※ 계약 금액내 사업구간 조정 실시(난지시설보수과-992, 3.26) (물가변동으로 인한 계약금액은 발주청 별도 예산 확보)

2. 제경비 사용금액 실적용에 의한 변경

연번	구분(제목)	주요 변경내용	도급비 증․감	관련 근거
1	보험료 등 정산	- 건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제, 건설기계대여금 실 사용 금액 적용	감) 73,631천원	실 사용 금액 (17,420천원)
2	산업안전보건관리비 등 정산	산업안전보건관리비, 환경보전비 실 사용금액 적용	감) 50,189천원	실 사용 금액 (11,410천원)

◯ 주요 수량 변경 내용

공종	규격	단위	당초	변경	증․감
단면복구보수	벽체(KRCD),T=30㎜	㎡	6,131	5,072	감) 1,059
	천정(KRCD), T=30㎜	㎡	2,660	2,197	감) 463
	바닥(KRCD), T=85㎜	㎡	-	1,520	증) 1,520
맨홀신설 및 확경	1.8~2.8m	개소	5	6	증) 1
기타보수 및 부대공	-	식	1	1	-

총 공사비 검토

◯ 설계변경으로 인한 계약금액 조정                            (단위: 원)

구 분		당 초	변 경		증 ․ 감
도급비	공급가액	3,093,968,182		3,126,503,637	증)	32,535,455
	부가가치세	309,396,818		312,650,363	증)	3,253,545
	계	3,403,365,000		3,439,154,000	증)	35,789,000

※ 물가변동금액(ES 정산금액:62,979,000원) 반영

조치 의견

상기 설계변경 검토 내용을 발주청에 제출하고자 합니다.

붙  임: 1. 설계변경 심의 조치결과 보고서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.
3. 설계변경 관련 서류 각 1부.  끝.