문서번호	시설보수과-10115
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
협조

설계변경(정산) 검토 보고

〈여의2교 보수공사〉

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 검토 보고

『여의2교 보수공사』와 관련하여 감독기관인 서울시시설관리공단으로부터 설계변경 보고서가 접수되어 내용 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▶ 관련문서 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독1처-13794호(2014.12.16)

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 여의2교 보수공사

공사기간 : 2014. 5.12 ~ 2015. 1. 6

공사개요 : 받침장치 보수공 31개소, 바닥판 연결공 2개소,

콘크리트 균열보수 608m 등

도 급 액 : 583,504천원

도 급 자 : 거현산업(주)  박기옥

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		설계변경 내용

변경사유

○ 발주처 추가 작업지시 및 현장 실정보고에 의한 물량 증가

○ 실시공 수량 정산에 따른 물량 증·감

변경내용

1) 현장 실정보고에 의한 변경

○ 관련근거 : 공사감독1처-6465호(2014.07.22)

- 교좌방치 보수관련 교좌방치 전체 인상으로 인한 금액 변경

- 강관틀비계, 공간비계가 현장여건상 설치가 불가하여 트럭크레인으로 변경

○ 관련근거 : 공사감독1처-13468호(2014.12.11)

- A1 교대부 3개소 지장물로 인하여 교좌장치 시공 제외

- 연석부 콘크리트 단면보수 시공 제외

- 보도부 포장공 신축이음 후타 콘크리트 타설로 인하여 시공 제외

2) 작업지시에 의한 변경

○ 관련근거 : 시설보수과-9358호호(2014.11.21)

- 배수홈통설치 : S2, S3, S4 바닥판 하면

- 연석부 콘크리트 보수 : P1~P3(영방향 96m)

○ 관련근거 : 시설보수과-9358호호(2014.11.21)

- 바닥판하면 : 콘크리트 보수시행, 교대 및 교각-균열보수 시행

주요공종 수량 변경

공 종	규 격	단위	당초	변경	증·감
교량 인상/인하	200ton	개소	31	74	증)43
임시 지지시설		개소	31	74	증)43
교량받침 보수	가동단	개소	15	12	감)3
보도부 포장(야간)	t=10mm	㎡	17	0	감)17
배수홈통설치(강관)	STS, 150A	m		177.9	증)177.9
공중비계	주간	㎡	1,837		감)1,837
강관틀비계 설치	3개월 미만	㎡	3,600		감)3,600
보호막(분진, 방진망) 설치	주간	㎡	1,837		감)1,837
트럭크레인	10ton	hr	0	328	증)328

공사비 변경사항

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		590,311,270	613,255,530	증	22,944,260
도급비	공 급 가 액	530,458,182	552,672,728	증	22,214,546
	부가가치세	53,045,818	55,267,272	증	2,221,454
	합 계	583,504,000	607,940,000	증	24,436,000
관급자재비		3,727,270	3,312,530	감	414,740
이 전 비		3,080,000	2,003,000	감	1,077,000

Ⅲ		조치계획

○ 상기 내용과 같이 공사물량 및 공사금액이 변경되었기에 설계변경 시행 후 도급자로 하여금 재계약토록 조치코자 함

붙  임  1. 관련문서 각 1부

2. 설계변경내역서(정산) 1부.

3. 제비율 검증서 1부.  끝.