보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					09/24
문서번호	공사감독2처-15874
보존기간	3년		협 조	나급
결재일자	2014.09.24.
공개여부	공개
제 목	설계변경(정산) 보고-수락고가교 외1개소 보수보강공사

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 수락고가교 외 1개소 보수보강공사

나. 공사기간 : 2013년 10월 23일~2014년 9월30일

다. 도 급 액 : 2,461,360,000원

라. 공사개요 : 교면포장 A=5,850㎡, 신축이음 L=84m, 단면보수 A=106㎡

표면보수 A=1,162㎡, 프리플랙스보강 A=240㎡, 배수로정비 L=480m

마. 도 급 자 : (주)극동에버텍 대표 유 성윤, (주)가립 대표 조 수기

바. 발 주 처 :북부도로사업소(교량보수과)

2. 설계변경(정산)에 의한 보고

가. 교면포장 SMAT-CON 생산량 물량정산

〇 수락고가교 교면포장 평삭 후 확인결과 당초 설계두께와 상이하고 또한 균열             및 열화부가 많아 SMAT-CON 생산량이 증가하여 실 정산

〇 수량증․감  당초 : 362.7㎥ ⇒ 변경 : 394㎥ 증)31.3㎥

※관련근거 : 실정보고 【공사감독2처-9505,2014.06.23】

실정보고 승인 【교량보수과-4776,2014.07.08,교량보수과-6557,2014.09.22)】

나. 프리플랙스 보강공 실 정산

〇 수락고가교 프리플랙스 보강공이 당초 240㎡로 설계 되었으나 교면포장 하부                  균열 및 열화부 검토 등 설계사 의견에 따라 보강 면적 재산정 후 1순위구간부터 보강 후           실정산

〇 수량증․감  당초 : 240㎡ ⇒ 변경 : 443㎡ 증)203㎡

※관련근거 : 실정보고 【공사감독2처-12453,2014.07.3】

실정보고승인 【교량보수과-5573,2014.08.06,교량보수과-6557,2014.09.22)】

다. 홍지문터널 배수로 형식변경 등에 의한 물량정산

〇 홍지문터널 배수로 현장조사 및 CCTV조사 후 관리부서인 공단 도로관리처

담당 및 팀장과 4차례 회의 후 배수로 형식 등 변경에 의한 실 정산

〇 수량증․감

-당초 : 트랜치배수관480m(종배수관),횡배수관30m, 집수정 8개소

-변경 : 트랜치배수관(중하중그레이팅) 78m, 원심력사각수로관(종배수관)106m                         집수정0개소, 종배수로 유공필터25개소, 종배수로 다발관 25개소

※관련근거【공사감독2처-4388,2014.04.16,교량보수과-2814,2014.04.24, 공사감독2처-8500,2014.06.11)】

라. 점검통로 설치 실정산

〇 수락고가교 하부 점검통로 현장조사 결과 대체로 양호하나 일부 훼손이 심한구간만                    시공토록하고 실 정산 하고자함.

〇 수량증감  당초 : 180m ⇒ 변경 : 32m 감)148m

※관련근거【공사감독2처-15496,2014.09.18,교량보수과-6557,2014.09.22】

마. 신축이음장치 하자보수 구간 제외

〇 하자보수기간 중인 의정부 방향의 신축이음장치는 본 공사에서 제외토록 하고자 함.

〇 수량증감  당초 : 84m ⇒ 변경 : 36m 감)48m

※관련근거【공사감독2처-9505,2014.06.23,교량보수과-4776,2014.07.08】

바. 고압물세척공 물량 추가 반영

〇 교량하부 화재로 인한 그을음이 많은 P6~A2구간 까지 고압물세척을 실시하고 실 정산하고자 함.

〇 수량증감  당초 : 1,288.5㎡ ⇒ 변경 : 3,685㎡ 증)2,396.5㎡

※관련근거【공사감독2처-9505,2014.06.23,교량보수과-4776,2014.07.08】

사. 기타 부대공 물량정산

〇 단부가드레일, 차량높이 제한시설,PC방호벽재설치 등 현장여건으로 인한 물량정산

※관련근거【공사감독2처-9505,2014.06.23,교량보수과-4776,2014.07.08】

3. 공사비 변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		2,648,885,690	2,621,387,210	감) 27,498,480
도급비	공 급 가 액	2,237,600,000	2,209,000,000	감) 28,600,000
	부가가치세	223,760,000	220,900,000	감) 2,860,000
	계	2,461,360,000	2,429,900,000	감) 31,460,000
관급자재비		40,008,890	43,970,410	증) 3,961,520
이 설 비		147,516,800	147,516,800	-

4. 조치 사항

〇 상기 변경사항을 발주처에 보고하고 회신결과에 따라 조치코자 합니다.

붙임 : 내역서 및 수량산출서 각 1부.  끝.