보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					09/30
문서번호	공사감독2처-16278
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.09.30.
공개여부	공개
제 목	설계변경(정산) 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 4.19묘지삼거리~4.19배수지간 세척갱생관 정비공사

나. 공사기간 : 2014.04.25 ~ 2014.10.21

다. 공사개요 : 관 부설 D=300mm, L=909m

라. 도 급 액 : 168,654,000원

마. 시 공 자 : 홍용종합건설(주) 대표 이춘택

바. 발 주 청 : 북부수도사업소(시설관리과)

2		보고내용

상기공사의 설계변경(정산)을 아래와 같이 보고합니다.

가. 설계변경 사유

1) 기 실정보고 사항 반영

○ 배수지 유출부 배수관로 재조정 『관련근거 : 공사감독2처-6759호 (2014.05.16)』

○ 도종 변경의 건 『관련근거 : 공사감독2처-9654호 (2014.06.25)』

○ 도로굴착 폭 변경 『관련근거 : 공사감독2처-9654호 (2014.06.25)』

○ 단수구역 발생 방지를 위한 바이패스실 설치 『관련근거 : 공사감독2처-9654호 (2014.06.25)』

2) 기타사항 반영

◦ 도종 변경에 따른 포장절단 공종변경 (감 9,029천원)

◦ 연금,건강,노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금 정산 (감 2,271천원)

◦ 실시공 수량 정산반영

나. 주요공종 수량 증, 감 내역

공 종	단 위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고 (직접공사비)
저소음콘크리트포장절단	m	2,246	-	감) 2,246	감) 15,735천원
저소음아스팔트포장절단	m	-	2,271	증) 2,271	증) 6,706천원
주철직관 부설공 (100~300mm)	m	909	901	감) 8	감) 94천원
원형 밸브실 설치공	개소	3	7	증) 4	증) 1,744천원
잔토 처리	㎥	1,042	1,289	증) 247	증) 5,227천원
환토재	㎥	874	548	감) 326	감) 5,328천원
교통정리원	인	102	42	감) 60	감) 4,344천원

다. 공사금액 변경내용

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	153,321,818	131,930,000	감) 21,391,818
	부가세	15,332,182	13,193,000	감) 2,139,182
	계	168,654,000	145,123,000	감) 23,531,000

3		조치의견

◦ 상기 설계변경(정산) 사항을 발주처에 제출하고 그 결과에 따라 처리(준공)코자 합니다.

붙임 : 설계변경(정산)내역서 및 관련서류 각 1부. 끝.