투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행 및 준공기한 연기(성내교보수공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『성내교보수공사』에 대하여 아래와 같이  설계변경(1회)시행 및 준공기한 연기코자 합니다.

가. 공 사 명 : 성내교보수공사

나. 공사기간

1) 당초 2014.10.31 ~ 2014.12.31

2) 변경 2014.10.31 ~ 2015.05.31

3) 연기사유 : 동절기 품질확보 어려움에 따른 절대공기 부족

4) 귀책사유 : 동부도로사업소

5) 지체상금부과 : 미부과

다. 도 급 자 : ㈜선우씨앤드에이건설 대표 정우금

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비	439,749,700	447,849,280	증)	8,099,580
도 급 비	332,604,700	345,125,000	증)	12,520,300
관급자재비	107,145,000	102,724,280	감)	4,420,720

마. 변경사유 : 신규물량 발생 및 물량증감에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 도로시설과, 교량관리, 일반교량관리, 성내교보수공사,

시설비및부대비, 시설비 – 증)12,520,300원

붙 임   1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기보고 1부.

2. 설계변경 관련도서 1부. 끝.

주무관			주무관			시설보수과장			동부도로사업소장
협조자	주무관			계약1팀장
시행	시설보수과-5068	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 서울 강남구 남부순환로 3142(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0341	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개