설계변경(제3회) 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

○ 심의일시 : 2018. 12. 3.(월)

○ 심의장소 : 급수운영과 사무실(3층)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 사전심의 보고(3회)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

○ 공사개요

구 분	계	아스팔트 포 장	콘크리트 포 장	보도블록 포 장	비 고
수량	413a	361a	24a	28a

○ 공사기간 : 2018. 3. 23.  ~  2019. 6. 30.

○ 수 급 자 : 엄다종합건설㈜  심영숙

○ 계약금액 : 2,196,056,900원

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 공사계약 일반조건(예규 제325호)“6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경금액 및 주요 설계변경 사유

○ 설계변경 금액 : 2,196,056천원 (변동없음)

○ 주요 설계변경 사유

- 현장에 적합한 시공 등으로 인한 포장복구 계약물량 증 ․ 감 발생

구 분	당 초		변 경		비 고
아스팔트 포장	361.0	a	336.0	a	감	25.0	a
콘크리트 포장	24.0	a	19.0	a	감	5.0	a
보도블럭 포장	28.0	a	18.0	a	감	10.0	a

- 물량증가 : ASP포장절단(100~150㎜) 외 43종

- 물량감소 : 토사절취(지세) 외 29종

□ 보고 및 처리의견

○ 현장여건 및 현장에 적합한 시공으로 인한 계약물량이 증·감되어 설계변경을

시행코자 함.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.

설계변경(제3회) 사전심의 의결서

◦ 공 사 명 : 2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장계계속)

◦ 상기 공사 설계변경(제3회)에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시하고 의결함.

◦ 의결내용 : 본안통과  ․  보류  ․  부결

구 분	직 위	의 견	서 명
위 원 장	급수운영과장 이 성 환
위 원	시설관리과 권 승 계
위 원	시설관리과 김 효 수
위 원	시설관리과 서 규 석
간 사	급수운영과 황 중 연

◦ 설계변경에 대한 수급사 의견 :

공사담당 : 지방시설주사                      성명 : 황 중 연(인)

2018.	12.	3.