검 토 의 견 서

□ 공 사 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사

□ 검토건명 : 설계변경 (총괄1회,1차1회)

1) 검토 목적

◦ 잠원2 빗물펌프장 신설공사중 실정보고 승인내용에 따른 결과( 수목이식 및 제거      변경사항)을 토대로 설계변경(총괄 1회, 1차1회)하고자 함.

2) 사업 개요

▣ 공사목적

◦ 기존 잠원 빗물펌프장의 용량 부족 및 통수능 부족 등으로 인하여 집중호우시 신사동 한남IC 주변 및 신사동 570번지 주변일대 침수가 자주 발생하고 있어, 시민공원 및 신사공원 내부에 빗물펌프장 및 저류조를 신설하여 지역 주민의 재산 및 인명 피해 예방에 만전을 기하고자 함.

▣ 공사규모

◦ 시민공원 및 신사공원 일대에 빗물펌프장 및 저류조 설치

- 펌프장 신설(펌프 및 흡수정 구조물/집수조구조물 15,500㎥)

- 관로신설(유입관로 2@3.0Ⅹ2.5 L=408.9m, 추진관로 3@D1900mm                         L=79.1m / 유출관로 2@3.0Ⅹ2.5 L=152.0m)

- 기존관거개량

(D=200mm L=285.7m, D=450mm L=266.2m, D=1,200mm, L=227.8m)

▣ 공사기간 – 전체 : 2012년 12월 31일 ~ 2014년 07월 02일

1 차 : 2012년 12월 31일 ~ 2014년 07월 02일

▣ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사외 2개사

▣ 시 공 사 : 에스트건설(주)

공 사 장 위 치 도	공 사 진 행 현 황

3) 검토내용

▣ 설 계 변 경 사 유

◦ 잠원2 빗물펌프장 신설공사와 관련하여 실정보고 승인 내용에 대하여 반영하고

자함.

▣ 설 계 변 경 근 거

내 용	승 인 문 서		비 고
	보 고	승 인
1. 조경공사 변경사항(수목이식 및 제거) 공사구간내 지장수목에 대해 관리기관 요구사항에 따라 가 식장 확보 곤란으로 구청 지정장소에 이식하고 대형수목 및 잔여수목은 현장소음발생 최소화를 위해 공사현장 밖으 로 반출하여 제거	잠원2감 2013-395호(13.12.30)	방재안전시설부-193호(14.01.06)

구분	설 계 주 요 내 용	비 고(천원)
1	1. 조경공사 변경사항(수목이식 및 제거) - 벌목 : 3,223㎡ → 0 ㎡ - 뿌리뽑기 : 1,039㎡ → 0 ㎡ - 수목제거(반출) : 0주 → 307주 - 가식 : 217주 → 0주 - 정식 : 218주 → 0주 - 수목이식(교목) : 0주 → 309주 - 수목이식(관목) : 0주 → 4,918주 - 임목폐기물 : 0톤 → 79.62톤	증)7,058
	합 계	증) 7,058

▣ 설 계 변 경 주 요 내 용

▣ 설 계 변 경 금 액

(단위:천원)

구 분	전 체 금 액			1 차 금 액
	당 초	변 경	증 (감)	당 초	변 경	증(감)
토 목 공 사	8,069,123	8,064,478	-	1,252,195	1,148,663	-103,532
1. 구 조 물	4,641,151	4,641,151	-	1,171,424	1,067,891	-103,533
2. 유 입 관 거	2,857,821	2,857,821	-	-	-	-
3. 신 설 관 거	208,996	208,996	-	-	-	-
4. 이설 및 부대비	361,155	356,510	-4,645	80,771	80,771	-
건 축 공 사	563,305	563,305	-	-	-	-
조 경 공 사	342,247	342,057	-190	18,835	117,377	98,542
직 접 공 사 비	8,974,675	8,969,840	-190	1,271,030	1,266,040	-4,990
제 경 비	3,357,593	3,362,428	4,835	447,152	452,142	4,990
공 급 가 액	12,332,268	12,332,268	-	1,718,182	1,718,182	-
부 가 가 치 세	1,233,227	1,233,227	-	171,818	171,818	-
도 급 액	13,565,495	13,565,495	-	1,890,000	1,890,000	-
관 급 비	3,895,850	3,895,850				-
총 공 사 비	17,461,345	17,461,345		1,890,000	1,890,000	-

4) 검 토 의 견

◦ 잠원2 빗물펌프장 신설공사와 관련하여 시공사에서 제출한 설계변경 내용을 검토한 결과 실정보고 승인완료된 사항으로 공사계약 일반조건 제19조 ~ 제23조에 의거 계약금액을 조정하는 것이 타당하다고 사료됨.

2 0 1 4 .  02 .                                              책임감리원  임 재 영