설계변경 세부 내용

1. 설계변경 내용

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비고
식재공사	▶ 평화공원 입구 주변 토사유실 방지 및 경관식재.	▶ 산철쭉 식재. ⦁산철쭉(H0.3*W0.3):550주 →915주
휀스철거	▶ 난지공원 휀스철거 구간에 장미 제거되어19경간 불필요.	▶ 장미울타리 기둥설치 90ea→71ea

2. 변경금액(개략공사비)

구 분		수 량				금 액(천원)				비고
공 종	규 격	당 초	변 경	증 감		당 초	변 경	증 감
휀스철거	기초존치	187	0	감)	187	-1,572	0	감)	-1,572
휀스철거	앙카철거	0	187	증)	187	0		증)	-2,616
장미울타리 기둥	H1.5*W1.5	90	71	감)	19	908	908	증)	908
산철쭉	H1.5xW2.0	550	915	증)	365	2,300	3,827	증)	1,526
순 공 사 비						8,941	9,088	증)	147
제 경 비						6,696	6,549	감)	147
공 사 비						15,637	15,637		0