보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					12/17
문서번호	공사감독2처-21786
보존기간	5년		협 조	과장
결재일자	2014.12.17.
공개여부	공개
제 목	설계변경보고(총차-5회, 2차-4회, 공릉빗물펌프장 신설)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총차 5,541백만원 (2차 1,747백만원)

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 52m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(방재시설부)

2		변경내용

가. 설계변경 사유

1) 현장여건에 맞게 설계조정

연번	구 분	변 경 사 항	공사비 증ㆍ감	관 련 근 거
1	기존 하수암거 보수보강(면목)	면목4동 기존하수암거(고지배수관로) 보수보강(WRC보수보강)	증)893,240천원	계약심사과-18413 (2014.12.16) 방재시설부-13062 (2014.12.10) 공사감독2처-21230 (2014.12.09)

연번	구 분	변 경 사 항	공사비 증ㆍ감	관 련 근 거
2	Sheet Pile 근입장 감소(공릉)	공릉동 빗물펌프장장 Sheet Pile 근입장 조정 감사 지적사항 반영 ※ 근입장감소에 따른 자재 수량조정 - 감)33.202 ton	감)12,346천원	방재시설부-12990 (2014.12.09) 공사감독2처-21142 (2014.12.09)
3	토출관로 가배수로 설치(공릉)	물돌리기용 가배수로 PE이중벽관 설치비 반영 - D=800㎜ L=38m	증) 9,449천원	방재시설부-12519 (2014.12.01) 공사감독2처-20262 (2014.11.26)
4	사전 사후 정밀안전점검(공릉)	빗물펌프장 신설로 영향받는 주변 건물 6개동 사전 사후 정밀안전점검 실시	증)18,832천원	방재시설부-12519 (2014.12.01) 공사감독2처-20244 (2014.11.26)
5	방음벽울타리, 출입문실사출력물 제작 설치(공릉)	공릉동 빗물펌프장 신설현장 민원 예방을 위한 부대시설물 설치 - RPP방음벽 77m - 가설홀딩도어 1개소, - 실사출력물 설치 1식	증)24,651천원	방재시설부-12300 (2014.11.26) 공사감독2처-19924 (2014.11.20)
6	추진구간 발진부 보강 그라우팅(공릉)	공릉동 추진공사중 토사유출대비 발진구 GIP그라우팅 보강 - 26공	증) 7,120천원	방재시설부-11524 (2014.11.11) 공사감독2처-18542 (2014.10.31)
	계		증) 940,946천원

나. 공사비 변경(증·감)

○ 총차분(제5회)                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	11,691,500,000	11,691,500,000	-
도 급 비	5,541,115,500	6,482,061,500	증) 940,946,000
관 급 비	842,245,200	842,245,200	-
이설비 및 기타	5,308,139,300	4,367,193,300	감) 940,946,000

○ 2차분(제4회)                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	2,553,000,000	5,021,000,000	증)2,468,000,000
도 급 비	1,747,080,000	3,267,770,000	증)1,520,690,000
관 급 비	652,899,000	427,092,710	감) 225,806,290
이설비 및 기타	153,021,000	1,326,137,290	증)1,173,116,290

3		조치의견

위 변경 설계서를 발주청에 제출하고 그 결과에 따라 처리코자 합니다.

붙  임 : 변경내역서 각 1부.  끝.