설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

2. 도 급 자 : 디앤아이건설(주) 대표 이동원

3. 공사기간 : 2014. 03. 21 ~ 2015. 02. 28

4. 변경 사유

o 도로부속물 및 교통안전부속물 공종별 수량 증·감

- 관급자재 정산 및 이설비 정산

5. 주요 변경사항

구분	공 종	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1	도로표지병 설치	개	15,544	15,118	감) 426
2	시선유도봉 설치	개	530	585	증) 55

6. 공사비 현황

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		374,612,300	349,326,000	감) 25,286,300
도급비	공급가액	270,483,637	270,310,000	감) 173,637
	부가가치세	27,048,363	27,031,000	감) 17,363
	계	297,532,000	297,341,000	감) 191,000
관 급 비		48,391,450	48,131,000	감) 260,450
이 설 비		28,688,850	3,854,000	감) 24,834,850