설 계 변 경 사 유 서

▣ 용 역 명 : 2014년 도로교통소통 개선공사 교통안전시설물 감리용역

▣ 용역기간 : 2014. 7. 11 ∼ 2014. 10. 20

▣ 도 급 자 :(주)영호이앤씨 대표 정숙영

▣ 설계변경 사유

○ 본 용역은 2014년 도로교통소통 개선공사 교통안전시설물 감리용역으로 본 공사 현장여건 변동에 따른 단순 물량증가로 설계변경 시행

▣ 설계변경 금액

(단위:원)

	구 분	당 초	변 경	증･감	비고
･	총용역비	761,200	803,000	증 41,800
･	도급비	761,200	803,000	증 41,800

▣ 공사감리 변경내역

	구 분	규격	단위	수량		증･감	비고
				당초	변경
･	노면표시 도색		m	1,912	4,880	증) 2,968
･	교통안전표지 설치		개소	24	26	증) 2

2014.  9.

작성자 :	지방시설주사보 홍종인(인)
확인자 :	도로과장 한희선(인)