설계 변경 사유서 (전체 5회)

■ 현 황

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사를 시행함에 있어 전체 5회 설계변경 사항을 3차 공사에 반영하고 지역주민, 노원구 요청사항에 따른 월계역사 까지 연장공사 실정보고(계약심의)사항을 반영코자 전체 공사금액에 대한 변경을 검토 하고자 함.

■ 공사개요

◦ 공사구간 : L = 191.0m , B = 4.5m

◦ 공사구간 : L = 251.0m , B = 4.5m

◦ 공사(전체) :

-. 당초

①   -

-. 변경

①  월계역사 연장공사

- 토목공사       - 1식

- 건축공사       - 1식

- 사급자재       - 1식

- 수탁안전점검비 - 1식

◦ 공사금액

구분	당 초	변 경	증 감	비 고
전체분	6,454,822 천원	8,084,230 천원	(증) 1,629,408천원

◦ 공사기간

구분	당 초	변 경	비 고
전체분	2016.04.29.~ 2018.04.28.	2016.04.29.~ 2018.11.30.

■ 전체 5회 공사 (증.감) 현황

1. 변경 현황                                                           (단위:백만원)

공 종 명	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 △ 감
1. 토 공	47	47	-
2. 교 량 공	2,942	2,942	-
3. 부 대 공	1,176	1,176	-
4. 사 급 자 재	118	118	-
5. 월계역사연장공사		1,106	1,106
5. 간 접 공 사 비	1,370	1,730	360
6. 정기안전점검비	38	38	-
7. 시공상세도작성비	14	14	-
9. 설 계 용 역 비	163	163	-
10. 수 탁 안 전 점 검 비	-	16	16
11. 부 가 가 치 세	586	734	148
총 계	6,454	8,084	1,630

► 총 공사비 (증) 1,629,408천원

■ 검토 결과

◦ 상기와 같은 사유로 인하여 설계변경을 승인 받아 전체 공사 금액을 변경하고 내역에

반영하여 공사를 진행하는 것이 타당할 것으로 사료 됨.

작성자 : 현 장 대 리 인            이  철  우    (인)

검토자 : 책임건설사업관리 기술자   오  세  영    (인)

설계 변경 사유서 (3차 1회변경)

■ 현 황

중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사를 시행함에 있어 전체 5회 설계변경 사항을 3차 공사에 반영하자 함.

■ 공사개요

◦ 공사구간 : L = 191.0m , B = 4.5m

◦ 공사구간 : L = 251.0m , B = 4.5m

◦ 공사(3차분) :

-. 당초

①   -

-. 변경

①  월계역사 연장공사

- 토목공사       - 1식

- 건축공사       - 1식

- 사급자재       - 1식

- 수탁안전점검비 - 1식

◦ 공사금액

구분	당 초	변 경	증 감	비 고
전체분	6,454,822 천원	8,084,230 천원	(증) 1,629,408천원
1차분	1,814,700 천원	3,444,108 천원	(증) 1,629,408천원

◦ 공사기간

구분	당 초	변 경	비 고
전체분	2016.04.29.~ 2018.04.28.	2016.04.29.~ 2018.11.30.
3차분	2018.01.22.~ 2018.04.28.	2018.01.22.~ 2018.11.30.

■ 3차분 공사 (증.감) 현황

1. 변경 현황                                                           (단위:백만원)

공 종 명	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 △ 감
1. 토 공	21	21	-
2. 교 량 공	850	850	-
3. 부 대 공	286	286	-
4. 사 급 자 재	1	1	-
5. 월계역사연장공사		1,106	1,106
5. 간 접 공 사 비	449	809	360
6. 정기안전점검비	28	28	-
7. 시공상세도작성비	14	14	-
10. 수 탁 안 전 점 검 비	-	16	16
11. 부 가 가 치 세	165	313	148
총 계	1,814	3,444	1,630

► 총 공사비 (증) 1,629,408천원

■ 검토 결과

◦ 상기와 같은 사유로 인하여 설계변경을 승인 받아 3차(1회)금액을 변경하고 내역에

반영하여 공사를 진행하는 것이 타당할 것으로 사료 됨.

작성자 : 현 장 대 리 인            이  철  우    (인)

검토자 : 책임건설사업관리 기술자   오  세  영    (인)