설계변경사유서(정산)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)

○ 규    모

- 담장허물기 참여주택 : 30개소

- 그린파킹 주차면 조성 : 35면

○ 공사기간 : 2019. 3. 12. ~ 12. 31.

○ 시 공 자 : (주)현창산업 대표 김갑동

○ 도 급 비 : 166,442천원(주차장특별회계)

□ 설계변경 사유

○ 본 공사는 담장허물기 신청주택에 주차장 조성을 지원해주는 사업으로서, 당초 추정물량으로 설계하였으나 최종 실 시공물량을 반영하여 계약물량 조정

○ 주요 공사물량 증·감 내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증·감
콘크리트 깨기	㎥	100	134	증)34
도로경계석 설치	m	250	258	증)8
고압블록 포장	㎡	700	696	감)4

- 담장허물기 참여주택 : 30개소 → 23개소

- 그린파킹 주차면 조성 : 35면 → 37면

○ 계약금액 증·감 내역

- 당 초 : 166,442천원

- 변 경 : 142,813천원 (감 23,629천원)

○ 공사시방서 : 변경사항 없음