설 계 변 경 사 유 서

□ 설계변경 사유

○ 작업지시(1차~5차)에 의한 신규공종 및 수량 변경 반영

- 주요 작업지시 현황

‧ 제1차 : 대방지하차도외 6개소 흡입준설(116.4㎥)

대방지하차도 외 9개소 배수로 청소(54.3㎥)

‧ 제2차 : 여의천1,3복개 JOINT 누수차단장치 설치(79m)

사평지하차도 방호벽차수 보수공 Joint 설치(55m)

‧ 제3차 : 봉천천복개 콘크리트 표면보수(748㎡)

영등포지하차도 자전거 경사로 설치(48m)

‧ 제4차 : 잠수교 남측지하차도 도로표지병 설치(35개소)

‧ 제5차 : 상도터널 JOINT 누수차단장치 설치(42m), 점검구 설치(86개소) 등

□ 주요 수량변경

공종	규격	단위	당 초	변 경	증.감	비고
교면보수공	절삭후아스팔트 재포장	a	75	3	-72
방수공	교면방수-도막식	㎡	1,732	5	-1,727
신축이음보수공	신축이음장치보수	m	180	6	-174
콘크리트보수공	표면,단면 보수	㎡	2,239	2,663	424
강재보수공	Joint 누수차단장치	m	0	239	239

□ 신규공종 반영

○ JOINT 누수차단장치 설치(야간, B:800) : 상도터널 42.0m

○ 콘크리트 구멍뚫기(벽체) : 상도터널 2.0개소

○ 콘크리트 표면보수(천정) : 봉천천복개 166.0㎡

○ 자전거 경사로 설치 : 영등포지하차도 48.0m

○ 염곡지하차도 관리실방수 : 염곡지하차도 400.3㎡

○ 배수로 청소 : 대방지하차도외 9개소 54.35㎥

□ 공사기간 : 변경없음