설계변경 사유서

□ 공사개요

o 공 사 명 : 2021년 하천유지관리공사(연간단가)

o 공사기간 : 2021. 3. 19. ~ 2022. 2. 28.

o 공사규모 : 하천내 시설물 유지관리 등

o 도 급 자 : 삼아종합건설(주) 대표 김 성 주

o 도 급 액 : 금779,070,000원(금칠억칠천구백칠만원)

□ 설계변경사유

o 기 작업지시 물량 정산

o 기타 시공물량 증·감 등

□ 주요 시공물량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·감		비 고
아스팔트 기층공	㎡	100	-	감	100
아스팔트 표층공	㎡	100	-	감	100
보차도 경계석 설치	m	2	28	증	26
예․제초작업	㎡	38,377	86,343	증	47,966
풍수해대책 (상황요원)	hr	3,500	732	감	2,768
제설대책 (상황요원, 제설작업)	hr	2,100	-	감	2,100

□ 공사비 변경내역서                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
총공사비	1,263,088,000	1,051,587,140	감)	211,500,860
도급비	779,070,000	779,070,000		-
관급비	322,249,900	182,263,380	감)	139,986,520
이전비	161,768,100	90,253,760	감)	71,514,340

2021. 11. 16.

치수과장  김 윤 기 (인)

성북구(분임)재무관  귀하