설계변경(제2회) 사유서

□ 공사현황

◦ 공 사 명 : 2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

◦ 공사기간 : 2018.03.26. ~ 2018.12.31.

◦ 도 급 자 : 주식회사 승리씨앤지 대표 이건영

□ 설계변경사유

◦ 신규공종 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
아스팔트포장	T=12.5㎝	m2	1,392.0	2,488.0	1,096.0		물량변경
콘크리트포장	T=15~20㎝	m2	261.0	289.0	28.0		물량변경
하수관부설	D=250㎜~800㎜	m	900.0	1,115.0	215.0		물량변경
맨홀설치	1~2호	개소	37	50	13		물량변경
빗물받이		개소	71	88	17		물량변경
옥내하수역류 차단기설치	D=50mm~150mm	개소	0	185	185		신규공종
차수판제작설치	수밀형, H=0.4m	m	0	281	281		신규공종

◦ 관련근거 :

- 2018년 침수취약가구 침수방지시설 지원계획 [치수과-3582(2018.03.19.)]

- 2018년 지선하수관로 개량사업 추진계획 [치수과-5279(2018.04.13.)]

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 공 사 비	904,853,130	1,234,494,580	363,298,450	33,657,000
도 급 비	591,770,000	923,050,000	331,280,000	-
관 급 비	133,083,130	165,101,580	32,018,450	-
이 전 비	180,000,000	146,343,000	-	33,657,000
폐기물 처리비	-	-	-	-

2018.  9.   .

치수과장  송 기 민 (인)

성북구(분임)재무관  귀하