설계변경(제3회) 사유서

□ 공사현황

◦ 공 사 명 : 2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

◦ 공사기간 : 2018.03.26. ~ 2018.12.31.

◦ 도 급 자 : 주식회사 승리씨앤지 대표 이건영

□ 설계변경사유

◦ 신규공종 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
아스팔트포장	T=12.5㎝	m2	2,488.0	4,263	1,775		물량변경
콘크리트포장	T=15~20㎝	m2	289.0	962	673		물량변경
하수관부설	D=250㎜~800㎜	m	1,115.0	1,276	161		물량변경
맨홀설치	1~2호	개소	50	79	29		물량변경
빗물받이		개소	88	192	104		물량변경
옥내하수역류 차단기설치	D=50mm~150mm	개소	185	234	49		물량변경

◦ 관련근거 :

- 추가경정 예산 및 낙찰차액 사용계획 보고 [치수과-16010(2018.10.18.)]

- 동소규모 주민생활 편익사업 추진계획 보고 [치수과-18347(2018.11.28.)]

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 공 사 비	1,234,494,580	1,733,464,740	498,970,160
도 급 비	923,050,000	1,326,430,000	403,380,000
관 급 비	165,101,580	221,745,060	56,643,480
이 전 비	146,343,000	185,289,680	38,946,680

2018.  11.   .

치수과장  송 기 민 (인)

성북구(분임)재무관  귀하