설계변경(제4회) 사유서

□ 공사현황

◦ 공 사 명 : 2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

◦ 공사기간 : 2018.03.26. ~ 2018.12.31.

◦ 도 급 자 : 주식회사 승리씨앤지 대표 이건영

□ 설계변경사유

◦ 신규공종 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
아스팔트포장	T=12.5㎝	m2	4,263	5,367	1,104		물량변경
콘크리트포장	T=15~20㎝	m2	962	1,206	244		물량변경
하수관부설	D=250㎜~800㎜	m	1,276	1,514	238		물량변경
맨홀설치	1~2호	개소	79	87	8		물량변경
빗물받이		개소	192	222	30		물량변경

◦ 관련근거 :

- 종암로19나길 15일대 하수관로 정비계획-긴급복구비 [치수과-13975(2018.09.11.)]

- 화랑로21길 64 일대 하수관로 정비계획-긴급복구비 [치수과-14993(2018.10.01.)]

- 동소규모 주민생활 편익사업 추진계획 보고 [치수과-18543(2018.12.03.)]

- 준공기한 연기검토보고 [치수과-18432(2018.11.29.)]

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 변경

- 당 초 : 2018. 3. 26. ~ 2018. 12. 31.

- 변 경 : 2018. 3. 26. ~ 2019. 02. 28. (증 59일)

○ 변경사유

- 다음연도 사업 착공(2월전)전까지 하수시설물에 대한 긴급복구 및 민원처리를 위하여 준공기한 연기

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 공 사 비	1,733,464,740	2,069,751,420	341,526,230	5,239,550
도 급 비	1,326,430,000	1,663,380,000	336,950,000
관 급 비	221,745,060	226,321,290	4,576,230
이 전 비	185,289,680	180,050,130		5,239,550

2018.  12.   .

치수과장  송 기 민 (인)

성북구(분임)재무관  귀하