설계변경 사유서

○ 용 역 명 : 차집관로 수문 성능개선 기본 실시설계

○ 개    요 : 차집관로 시설물 현황 조사 136개소, 기본 및 실시설계 1식 등

○ 기    간 : 2014. 5. 29 ~ 2015. 2. 17

○ 설계변경 사유

- 시설물 현황측량 수량 증가 : (당초) 3,400㎡ → (변경) 3,450㎡

- 시설물 현황조사 개소 증가 : (당초) 136개소 → (변경) 138개소

- 자문료 지급액 감소 등

○ 주요 변경내역

공 종	단위	당초 수량	변경 수량	증․감
시설물 현황측량	㎡	3,400	3,450	증 50
시설물 현황조사	개소	136	138	증 2
자문료	천원	1,800	700	감 1,100