설계변경 사유서

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 차집관로 성능개선 기본 실시설계 용역

○ 개    요 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 L=11.2Km, 기타

○ 기    간 : 2016. 4. 20 ~ 2017. 10. 11

(1차분 : 2016.4.20.~2017.6.30.)

○ 용 역 비 : 1,465백만원(1차분 : 800백만원)

□ 설계변경 사유

○ 과업 대상구간 일부 조정(2030 하수도정비기본계획 반영)

○ ‘17년 확보 예산(300백만원) 반영 및 과업기간 연장

○ 외부 자문위원 수 변경 등

□ 주요 변경내역(2차분)

구 분	단 위	변경 내용		증,감
		당 초	변 경
기본 및 실시 설계 연장	Km	7.8	8.1	증 0.3
도급비	백만원	800	1,100	증 300
자문위원 수	인	5	4	감 1
기 타	식	1	1	1