설계변경 사유서

1. 용 역 명 : 일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역

2. 용역기간 :  2019.3.26 ~ 2019.12.24.

3. 도 급 자 : (사)대한산업안전협회 대표 외 1

4. 도 급 비 : 179,340,000원

5. 변경사유

○ 자문비 감액

- 중간보고 및 최종보고 자문(2회, 10인) 시행에 따른 자문위원 자문비 감

․ 당초 : 2,250,000원

․ 변경 : 1,000,000원

○ 위례터널 분담금 구분

- 위례터널의 서울시와 성남시 분담금 구분에 따른 예산과목별 용역비 변경

․ 당초 : 178,090,000원(서울시 100%)

․ 변경 : 167,071,470(서울시 65%), 11,018,530(성남시 35%)

6. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		용 역 비				비 고
		당 초 (서울시)	변 경
			계	서울시	성남시
총용역비		179,340,000	178,090,000	167,071,470	11,018,530
도급비	공급가액	160,990,909	160,990,909	150,974,063	10,016,846
	부가세	16,099,091	16,099,091	15,097,407	1,001,684
	자문비	2,250,000	1,000,000	1,000000	0
	계	179,340,000	178,090,000	167,071,470	11,018,530