설계변경 사유서

■  공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통부속물유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 델리네이터설치및제거  80개, 시선유도봉정비40개

○ 공사기간 : 2014.03.26 ~ 2015.02.28

○ 총공사비 : 91,103,100원(도급비 56,857,800원, 관급비 및 이설비 34,245,300원)

○ 계 약 자 : 정우건설산업(주) 대표 최정우

■  설계변경 사유

○ 민원관련 타부서 요청 등 현장여건에 따른 물량증감 발생

■  주요 변동내역

○ 갈매기표지설치및보수 : 105개 → 61개(감44개)

○ 보행자방호울타리(차도)재설치 : 250경간 → 86경간(감164경간)

○ 도로표지병설치및정비 : 28개 → 1,391개(증1,363개)

■  사업비 변동내역

구 분	당 초 (원)	변 경 (원)	증감
계	91,103,100	91,103,100	-
도급비	56,857,800	56,857,800	-
관급비	32,675,500	32,675,500	-
이전비	5,168,891	5,168,891	-