설계변경(최종) 사유서

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2020년 관내2구역 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020.03.10. ~ 2020.12.24.

○ 수 급 자 : 광희건설(주) 대표 우광희

□ 설계변경사유

○ 주요공종 시공물량 증․감 내역

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
빗물받이 준설	1호	개소	3,160	3,046	-	114
빗물받이 준설	2호	개소	9,250	10,850	1,600	-
연결관 준설	흡입식	개소	2,920	3,758	838	-

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 공 사 비	262,688,620	298,849,000	36,160,380	-	-
도 급 비	257,688,620	293,849,000	36,160,380	-	-
이 전 비	5,000,000	5,000,000	-	-	-

2020.  11.   .

치수과장  김 윤 기  (인)

성북구(분임)재무관  귀하