설 계 변 경 사 유 서

□ 공 사 명 : 2018년 보안등 유지보수공사(연간단가 2구역)

□ 공사기간 : 2018. 2. 26 ~ 2018. 12. 31

□ 공사개요

○ 램프교체 800개, 안정기교체 350개

○ LED보안등기구 교체 및 신설 750개

○ 기타 보안등 시설보수 1식

□ 도 급 자 : ㈜정도기전  대표 이재번

□ 설계변경사유

○  석관동 한천마을 주거환경개선사업 시행에따른 LED등기구 교체비설계반영 (19,108천원 증액)

○  2018년 가로등․보안등 유지보수공사 낙찰차액 사용계획에 따른 낙찰차액 99,589천원 중 45,000천원사용

○ 장위동 도시재생활성화지역(장위13구역 해제지역)내 LED보안등기구 설치완료후 도급비 잔여분 31,229천원 감액

○ 현장 여건에 따른 시공물량 증․감

□ 주요사업(공종) 물량변경내역

사업	주요공종	변경내역(개소)			예산내역(천원)
		당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
한천마을 LED보안등 개량사업	LED개량 및 신설	0	63	증) 63	0	19,108	증)19,108
장위13구역 LED보안등 설치완료	LED보안등 개량	530	444	감) 86	170,000	138,771	감)31,229
2018년 보안등 유지보수공사 (연간단가-2구역)	각 종	-	-	-	170,271	215,271	증)45,000

2018. 9.

도 로 과 장