설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사

2. 도 급 자 : 호곡종합건설(주) 대표 : 박성환

3. 공사기간 : 2016.08.19 ~ 2016.11.30

4. 공사금액 : 84,515천원

4. 설계변경 사유

- 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종발생

5.  주요 변경내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
소형고압블록철거	-	㎡	540	774	증) 234
경계석설치	150*150*1000	m	200	438	증) 238
빗물받이설치	400*500	개소	9.00	6.00	감) 3.00
도로커팅	-	m	0.00	300	증) 300
이중벽관설치및부설	D=250	m	0.00	29.0	증) 29.0
인력비빔타설 무근구조물	fct=21Mpa	m	0.00	9.00	증) 9.00
급수탑보호덮개	-	식	0.00	1.00	증) 1.00
잔디식재	0.3*0.3	㎡	40.0	190	증) 150
관목이식	무궁화	주	120	0.00	감) 120

끝.