설 계 변 경 사 유 서

용역개요

용역명 : 광복교~안양교 주변 도로확장 기본 및 실시설계

위  치 : 광명시 철산동 ~ 구로구 구로1동

규  모 : 도로확장 폭 4~5차로→6차로, 연장 1.1km

용역비 : 661,760천원

기  간 : 2012. 6. 5 ~ 2014. 8.30

계약자 : 경동엔지니어링, ㈜천일

설계변경사유

서울지방국토관리청 하천협의시 경간장 확장 요구

서울시민디자인심의 시 미관고려 안양교 형식 특수교량(Pf→Arch)반영에

따른 재설계 불가피(343백만원)

당초 안양교 설계비(59.6백만원) 전액 감액사항 발생

재설계 추진에 따른 기존자료 활용으로 설계비 감액 (27백만원)

당초 설계에 반영된 사전환경성검토비 평가대상 제외 감액 (25.4백만원)

재설계로 인한 설계자문비 증액 (1.4백만원)

설계변경내역

(단 위 : 천 원)

구 분	당초계약	변경금액		비 고
		산출금액	조정금액
계	661,760	1,041,780	947,334	(증)285,574
광복교주변 확장 및 연결구간	395,500	395,500	395,500	변경없음
안양교 확장	59,600	429,300	343,440	(증)283,840
조 사 비	110,701	85,214	85,214	(감) 25,487
부 가 세	56,359	90,766	82,180	(증)25,821
도로포장평탄성 연구비	37,500	37,500	37,500	변경없음
설계자문비	2,100	3,500	3,500	(증) 1,400