설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

2. 도 급 자 : 디앤아이건설(주) 대표 이동원

3. 공사기간 : 2014. 03. 21 ~ 2015. 02. 28

4. 변경사유

o 교통사망사고 지점 시설개선 협조요청 및 예산 재배정

(교통운영과-4948호, 2014.3.14.)

o 난간 및 방호책 세척공종 추가

5. 주요 변경사항

구분	공 종	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1	시선유도봉 설치	개	310	322	증)12
2	도로표지병 설치	개	1,260	1,331	증)71
3	무단횡단금지시설 설치	m	13	323	증)310

6. 공사비 현황

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		281,187,800	314,505,800	증)33,318,000
도급비	공급가액	166,625,273	167,900,000	증) 1,274,727
	부가가치세	16,662,527	16,790,000	증) 127,473
	계	183,287,800	184,690,000	증) 1,402,200
관 급 비		60,000,000	91,687,500	증)31,687,500
이 설 비		37,900,000	38,128,300	증) 228,300