설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

2. 도 급 자 : 태평림건설(주) 대표 이동균

3. 공사기간 : 2014. 03. 21 ~ 2015. 02. 28

4. 변경사유 : 맨홀 관리기관 공종별 시공 물량 증, 감

5. 주요 변경 사항

o 불량맨홀 정비(주간) : 당초 131개소, 변경 266개소

o 불량맨홀 정비(야간) : 당초 425개소, 변경 316개소

6. 공사비 현황

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		522,113,800	522,113,800	-
도급비	공급가액	474,648,910	474,648,910	-
	부가가치세	47,464,890	47,464,890	-
	계	522,113,800	522,113,800	-