설 계 변 경 사 유 서

○ 공사명 : 2014년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)

○ 사  유

- 본 공사는 서울특별시도상에 설치되어 있는 각종 유관기관 관리시설 (통신,전기 ,상수도,하수 등) 맨홀중 도로 주행성에 지장을 주고 사고위험이 있는 불량 맨홀을 정비하는 공사로서 작업여건의 변동으로 일부 추정량이 조정 되었음.

- 당초 추정 정비물량으로 발주하였으나, 주요 간선도로 교통여건이 원활하지 못해 주간 작업량이 감소되고, 야간 작업량이 증가 되어 전체 정비 예정물량을 조정하였음.

○ 주요 내역물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증 감
주간작업	통신,상수도,하수도	개	164	49	(감) 52
야간작업	통신,상수도,하수도	개	382	470	(증) 8
계			546	519	(감) 27