설계변경사유서

○ 공 사 명 : 2014년 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 4. 16 ~ 2014. 12. 31

○ 설계변경 사유

▶ 신규공종 추가, 시공수량 증감사항 발생

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비고
1. 토공
기계터파기	BH02	㎥	10	1	감 9
무근크리트깨기	인력	㎥	10	1.5	감 8.5
무근크리트깨기	소형브레이커	㎥	10	1	감 9
무근크리트깨기	소형브레이커Box	㎥	10	1	감 9
철근콘크리트깨기	소형브레이커	㎥	10	7	감 3
철근크리트깨기	소형브레이커Box	㎥	10	1	감 9
2. 구조물공 및 조사공
합판거푸집	3회	㎡	10	1	감 9
합판거푸집	3회 Box내 작업	㎡	5	1	감 4
합판거푸집	4회	㎡	10	51.5	증 41.5
합판거푸집	4회 Box내 작업	㎡	5	1	감 4
사각맨홀 뚜껑	2700*2700 개폐식	개	0	1	증 1
사각맨홀 뚜껑	2300*2300 개폐식	개	0	2	증 2
SUS사각맨홀 뚜껑	2500*2500 개폐식	개	0	1	증 1
토사유입유량조절 장치		개	2	2	-
3. 부대공
환기구 정비	300	개	1	1	-
환기구 정비	450	m	1	1	-
조명시설(임시가설)		m	800	272	감 528
가설휀스		개	233	5	감 228

끝.