설계변경사유서

○ 공 사 명 : 2014년 센터내 시설물유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2014. 12. 31

○ 설계변경 사유

▶ 신규공종 추가, 시공수량 증감사항 발생

▶ 외곽산책로 정비 1식

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비고
1. 토공
터파기	BH04	㎥	50	91	증41
콘크리트(기계)깨기	BH04	㎥	60	60	-
되메우기(기계)	BH04	㎥	30	550	증520
흡입준설	25ton	㎥	0	10	증10
2. 구조물공
강관부설	D=100mm	m	0	12	증12
강관접합	D=100mm	m	0	4	증4
소화전 설치	옥외,지상식,쌍구형	조	0	1	증1
3. 포장공
아스팔트(표층)포장	인력, t=5cm	a	5	3	감2
혼합기층공	인력, T=20cm	a	5	3	감2
콘크리트 포장	레미콘, T=20cm	a	3.5	3	감0.5
4. 보수공
균열보수		m	0	3,300	증3,300
휀스설치		m	0	12	증12
에어워셔 설치		개	0	1	증1
5. 조경공
사과나무		주	0	10	증10
매실나무		주	0	10	증10
살구나무		주	0	10	증10

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비고
자두나무		주	0	10	증10
모과나무		주	0	10	증10
6. 부대공
기타		식	1	1	-
7. 외곽산책로 정비		식	0	1	1

끝.