설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 수처리 기계시설물 보수공사(연간단가)

2. 도 급 자 : 대윤환경(주)   대표 안지성

3. 공사기간 : 2014. 05. 29 ~ 2014. 12. 31

4. 변경사유 : 신공종 발생 및 수량 증․감에 따른 변경

○ 최초침전지, 최종침전지, 방류동 기계설비 보수공사로 신공종 발생

○ 기타 시공물량 정산으로 수량 증․감 발생

5. 주요 수량 증․감 내역

구 분	변 경 내 용	비 고
공통분야	▶ 배관 교체(50A,100A,150A,200A) 물량 감소(640m → 0) ▶ 밸브 콕 설치(80A,100A,125A,150A,200A,300A) 물량 감소(117EA → 0) ▶ 잡철물 제작설치 물량감소(2.5톤 → 0톤)	감) 59,217천원
유입동 설비분야	▶ 침사인양기 수직레일 정비 물량 감소(4대→3대)	감) 2,727천원
최초침전지 설비분야	▶ #3 초침오니수집기 루프체인 정비 물량 증가(0→3,756m) ▶ 웨어스트립 철거 물량 증가 (420m→2,880m) ▶ 비금속플라이트 정비물량 증가(31→230EA) ▶ 어태치먼트 정비물량 증가(0→1,019EA) ▶ 신규 공종 발생(3처리장 구동장치 테이크업장치 설치외 9건)	증) 89,445천원
최종침전지 설비분야	▶ 종침오니수집기 차륜 교체 및 수리 물량 감소(48→11개) ▶ 종침오니수집기 구동감속기 정비물량 증가(0→8개소) ▶ 3처리장 종침 스컴제거용 산기관설치 물량 증가(0→ 4개소) ▶ 신규 공정 발생(3방류동 경유저장탱크 정비 외 5건)	감) 18,646천원