설계변경사유서

○ 공 사 명 : 직원관사아파트 리모델링공사

○ 공사기간 : 2014. 5. 29 ~ 2015. 02. 28

○ 설계변경 사유

- 시공물량 증가사항 발생, 신규공정 추가

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비고
2동,4동 공통
현관문 세대표시판		개	0	36	증) 36
2. 2동
차임벨 설치(무선)		개	0	16	증) 16
보일러 추가설치	13,000Kcal	개	14	16	증) 2
	-- 이하	내	역	서	참조	---