설계변경사유서

○ 공 사 명 : 2016년 농축조 보수공사

○ 공사기간 : 2016. 4. 1 ~ 2016.  7. 29

○ 설계변경 사유

1) 신규공종 추가 : 방식단면보수(박리박락) 벽체(T=20mm) 외 1개 공종

2) 공종 규격 변경 : 방식단면보수(박리박락) 벽체(T=30mm) 외 3개 공종

※ 농축조 3-2지 벽체의 열화상태가 당초 설계시 계획했던 것 보다 양호하여 T=30mm 치       핑후 보수토록 설계된 부분은 T=20mm 치핑후 보수하고, T=50mm를 치핑후 보수토록        설계된 부분은 T=30mm 치핑후 보수하는 것으로 변경(도급비 18,140,100천원 감액)

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비고
1. 토공
방식단면보수(박리박락)	벽체(T=20mm),습윤환경	㎡		75	증 75
방식단면보수(박리박락)	벽체(T=30mm),습윤환경	㎡	226	295	증 69
방식단면보수(박리박락)	벽체(T=50mm),습윤환경	㎡	434	289	감 145
콘크리트열화부제거	T=20mm	㎡		75	증 75
콘크리트열화부제거	T=30mm	㎡	226	295	증 69
콘크리트열화부제거	T=50mm	㎡	434	289	감 145
2. 부대고
가설사무실	콘테이너(3개월)	동	1	1
가설창고	콘테이너(3개월)	동	1	1
바닥청소		㎡	942	942
임시전력사용	발전기, 50kw	알	20	20
강관비계 설치(복시)	3개월 미만	㎡	508	508
환기휀 설치 및 해체	농축조	개소	6	6
작업등 설치 및 철거	농축조	개소	169	169