설계변경사유서

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 북한산공원 보수정비사업

○ 용역기간 : 2018. 07. 16. ~ 10. 31.

○ 도 급 비 : 금161,189,580원

○ 도급업체 : 한국도시녹화, 대표 김철민

○ 공사내용 : 자연학습장 조성 및 수목식재 등

2. 변경사유

○ 현장여건에 따른 물량 조정 및 대상지 추가

○ 제비율(보험료) 정산

3. 공사비 증감내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	161,189,580	177,001,000	증 15,811,420

4. 예산과목

○ 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화,

시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(시비-도시개발특별회계)

2018. 10.

보 고 자    지방녹지주사보        박 일 영  (인)

확 인 자    공원녹지과장          이 상 용  (인)