설 계 변 경 사 유 서

▣ 공 사 명 : 2019년 관내 하천시설물 보수공사(연간단가)

▣ 공사기간 : 2019. 2. 25 ~ 12. 31

▣ 도 급 자 : 용일토건(주)  대표 박준상

▣ 설계변경사유

○ 현장여건 변동에 따른 공종별 단순 증감 물량반영 및 신규공종 발생

▣ 주요 물량 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증ㆍ감(△)	비 고
			당 초	변 경
아 스 콘 포 장	t=5cm	a	20	25	5
보도블록포장	t=6cm	a	5	24	19
경 계 석 설 치	150 ~ 250mm	m	300	1,086	786
하 천 준 설	인력, 기계	㎥	0	2,220	2,220
난 간 철 거	H=1.2m	m	0	102	102

2019. 06.   .

치수과장  윤 석 빈 (인)

강남구경리관  귀하