설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 슬러지 야적장 옹벽설치 공사-중랑

2. 도 급 자 : (주)벽산엔터프라이즈  대표 김동운

3. 공사기간 : 2019. 9. 16. ~ 2019. 12. 30.

4. 공사금액 : 금174,097,000원(부가세포함)

4. 설계변경 사유

- 시공물량 변경(감)

5.  주요 변경내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
역T형옹벽	H=2m	m	260	247	감) 13
U형측구 설치	500 X 500	m	60	0	감) 60
	300 X 300	m	-	34	증) 34
	600 X 600	m	-	30	증) 30

끝.